투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전-2022년 수방대비 공사장 합동점검 에 따른 조치계획 제출 요청(보행교, 보차도교)

1.업무지시현장 : 창동 상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사(장기1차) 하웅종합건설(

주), 창동 상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사(장기1차) 주식회사

케이지엔지니어링종합건축사사무소, 창동 상계 동서간 연결교량 보행

교 건설공사(장기1차) 청광건설 주식회사, 창동 상계 동서간 연결교량

보행교 건설공사(장기1차) 주식회사 동해종합기술공사, 창동 상계 동

서간 연결교량 보행교 건설공사(장기1차) 주식회사 삼보기술단

2.작 성 일 자 : 2022-04-25 09:04:19

3.지 시 내 용

하천관리과-21926호('22.04.22.)관련 2022년 수방대비 주요공사장 합동점검     결과를 송부 하오니 지적사항을 반영하여 수방대책 계획을 4.29일(금)까지 제출하여     주시기 바라며 지적사항 조치결과는 5.18(수)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 주요 점검결과(보차도교, 보행교)

- 하천점용허가 조건(서울지방국토관리청 하천계획과-6383, 2021.11.12)을 준수하여 공사를

시행하기 바라며, 특히 수방기간(5.15~10.15)에는 홍수위를 증가시키거나 하천 흐름에

장애가 되는 가도 또는 가시설은 하천 밖으로 반출하기 바람

- 비상연락망 정비, 수방자재 확보, 장비관리실태 파악 등 호우에 대비할 것(하천내 장비

대피 계획 포함)

- 홍수예보시 중랑천 고수부지 자전거도로 진입차단 계획을 수립하기 바람

- 공사구간 상·하류부 가도와 성토부에 대한 홍수시 대비방안을 수립하기 바람

· 중랑천 상류 강우기록과 관련된 공사현장 수위기록 확보하고, 상관관계 유지

· 강우예보시 가도 및 공사현장 철거를 포함한 구체적인 수방계획 수립

· 상류지역 강우량별 현장 수위분석 및 수방계획서 작성 및 비치

- 보차도교 및 보행교 좌·우안 제방사면 절취부에 대한 보호공을 설치하고, 제방       상부 도로 계측계획을 수립하기 바람

붙 임 : 관련문서 1부. 끝.

주무관	이회진		교량건설과장	전결 04/25
황윤기
협조자
시행	토목부-22102	(	2022.04.25	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)	/	http://seoul.go.kr
전화		/전송	02-3708-2599	/		/	부분공개(5,6)