문서번호	정수시설과-20841
결재일자	2022. 4. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
장현순		유통희	04/25
			김훤기
협조
	주무관		김영후

건축 토목 시설물 정비공사(장기계속단가계약) 실정 보고

2022. 4.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

건축 토목 시설물 정비공사(장기계속단가계약) 실정보고

건축 토목 시설물 정비공사(장기계속단가계약)에 대하여 트렌치 설치 등 추가 작업으로 신규공종 발생에 따른 공종별 물량 증가에 대한 실정 보고와 동시 본부 안전조사과에 설계변경 심사 의뢰코자 함

□ 사업 개요

○ 공사명 : 뚝도아리수정수센터 건축 토목 시설물 정비공사(장기계속단가계약)

○ 주요공종

- 인력터파기                    - 콘크리트 인력비빔타설

- 난간설치(스텐레스)             - 수성페인트 롤러칠

○ 공사기간 : 2022.1.1.~ 5.30.(총공사 부기기간 : 2021.3.30.~2022.5.30.)

○ 도급액 : 41,458,900원(총도급액 : 481,359,900원)

○ 도급자 : ㈜성건토건  대표 임성구

□ 계약변경 사유

○ 약품저장탱크동 트렌치 설치 등 시설개선 보고(정수시설과-6635)

- 트렌치 1개소 및 방류벽 등 설치, 소요비용 8,209천원

○ 웰빙센터 휴게실 시설개선 등 시설개선 보고(정수시설과-6634)

- 휴게시설 시설개선 및 빗물 유입방지 등, 소요비용 9,666천원

○ 활성탄흡착지동 내부 방충문 등 시설개선 보고(정수시설과-6636)

- 방충문 개선 1개소 및 점검구 개선 등, 소요비용 6,313천원

○ 탈수기동 전동셔터 보수 실정 보고(정수시설과-81)

- 전동셔터 1개소 보수, 소요비용 2,919천원

○ 안전난간 설치 등 실정 보고(정수시설과-79)

- 안전난간 설치 및 안전시설 보완 등, 소요비용 7,527천원

○ 웰빙센터 1층 사무실(기술지원팀)정비 실정 보고(정수시설과-608)

- 수성페인트 칠 등, 소요비용 9,660천원

○ 수목 가지치기 등 실정 보고(정수시설과-1365)

- 수목 가지치기 및 점검구 보수 등, 소요비용 8,395천원

□ 주요 물량 증·감 내역

공종	단위	물 량			비고
		당초	변경	증·감
인력터파기(견질토사)	㎥	0	0.18	0.18
콘크리트인력비빔타설	㎥	0	1.54	1.54
난간설치(스텐레스)	ton	0	0.1	0.1
잡철물제작(철, 간단)	ton	1	0	1.00
수성페인트롤러칠(벽체, 2회)	㎡	0	56.13	56.13

□ 개략 공사비 현황

구분	당초(원)	변경(원)	증·감(원)	비고
총부기금액	481,359,900	491,073,000	증9,713,000
1차수 계약금액	439,901,000	439,901,000	-
금회(2차수)계약금액	41,458,900	51,172,000	증9,713,100

□ 조치 계획

○ 현장여건에 따른 위의 신규공종 발생, 시공물량 증·감 및 공사금액 증가 사항에 대하여 설계변경 및 기성 반영조치

○ 설계변경에 대하여는 본부 안전조사과에 설계변경심의 요청하고 심의 결과에 따라 설계변경 시행 및 행정관리과에 변경 계약의뢰

붙임 : 1. 설계서 1부

2. 공사 관련 보고서 각 1부.  끝.