문서번호	한양도성도감-21149
결재일자	2022. 4. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	도성보존팀장	한양도성도감과장
최지애	代김창건	04/26
		김홍진

한양도성 남산구간 여장 원형조사 및 시범 보수 설계 계획

2022. 4.

문  화  본  부

(한양도성도감)

한양도성 남산구간 여장 원형조사 및 시범 보수 설계 계획

한양도성 남산구간 여장 원형 회복을 위한 고증조사 및 손상 여장 시범 보수 공사 설계 용역을 시행하고자 함

Ⅰ		추진 경위

○ ’22.2.10.~2.18. : 남산 여장 보수 필요 부분 현장조사

- 보수가 필요한 손상 여장 56타(※ 약 280m, 1타 x 5m)

○ ’22.2.24. : 제 2차 한양도성 자문위원회

- 참석위원 : **************************

○ ’22.3.3. : 관계기관 및 전문가 현장 자문회의

- 문화재청 보존정책과, 국립문화재연구소, 자문위원 ****************

○ ’22.3.16. : 문화재 기술자 현장 자문회의

- 문화재수리기술자(보수부분 : *******************), 문화재수리기술자

(보존과학 부분 : **********), 문화재실측설계업(*************)

○ ’22.4.11. : 문화재청 국고보조사업 지침변경 승인 통보**************

지침 변경 전	지침 변경 후
*****************************************************	***************************************************** *******************************************

Ⅱ		사업필요성 및 자문 검토결과

○ 한양도성 남산구간 여장의 축성법, 옥개석(유무) 등 고증조사를 실시하여 여장

원형을 찾고, 고증된 결과를 반영하여 남산구간 여장을 복원하고자 함

○ ’70년대 보수된 남산구간 여장 상부면 내구성 저하로 파손이 심각한 상태이며,

손상된 여장은 한양도성 경관을 해치고 있어 보수 정비가 시급함

○ ’70년대 시행한 보수 방법은 내구성 및 재료 검증이 되지 않았고, 손상이 반복될

우려가 있어 다양한 재료 및 방법을 시범 적용하여 검증하고자 함

Ⅲ		사업개요

○ 사 업 명 : 한양도성 남산구간 여장 원형조사 및 시범 보수 설계 용역

○ 사업금액 : 63,000,000원(부가가치세 포함)

○ 사업기간 : 착수일로부터 180일

○ 사업내용

□ 한양도성 남산구간 여장 원형조사

- 고문헌, 사진자료, 고지도, 그림, 종합정비계획 등 다양한 자료 분석

- 한양도성 남산구간 여장 축성법, 재료, 역사적 흐름(보수정비 포함) 조사

- 조선시대 성벽 여장 비교 검토(탕춘대성, 북한산성, 남한산성 등)

- 자문과 고증을 거친 남산구간 여장 복원 설계(안) 및 복원방향 제시

□ 남산구간 손상 여장 시범 보수공사(4가지 방안) 설계

- 설계대상 : 시범 보수 방법별 1타씩 총 4타(※ 약 20m, 1타 x 5m)

- 설계내용 : 시범 보수방법 4가지

기본 보수 방법	추가 처리
① 고강도석회 사용	-
② 고강도석회+혼합재료(마사토 등)	접착제+동망(매쉬망)
③ 고강도석회+혼합재료(마사토, 물 등)	발수경화처리
④ 무기질 보수재료 마감(보존처리 재료)	발수경화처리

손상된 남산구간 여장 상부면

Ⅳ		사업 발주계획

○ 입찰/계약방법 : *********

***********************************************

********************************

**********************************************

********************

○ 예산과목

- 문화본부 한양도성도감, 도성 보존관리 활용, 한양도성 보수 정비, 시설비

Ⅴ		향후계획

○ ’22년 5월 : 용역 계약 및 착수

○ ’22년 6월 : 보수설계 자문회의

○ ’22년 7월 : 문화재청 보수설계 승인

○ ’22년 8월 : 여장 원형조사 자문회의 및 여장 시범 보수공사 계약

○ ’22년 9월 : 남산 여장 원형조사 중간보고회 및 시범보수 공사

○ ’22년 10월 : 남산 여장 시범 보수공사 자문회의

○ ’22년 11월 : 남산 여장 원형조사 최종보고회

○ ’22년 12월 : 남산 여장 원형조사 및 시범 보수공사 완료

붙 임 : 1. 과업내용서 1부

2. 관련기관 및 전문가 자문내용 요약 1부.  끝.