문서번호	도로보수과-21242
결재일자	2022. 4. 26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
함인석		오재영	04/26
			김용제
협조
	주무관		정남현

『21/22년 제설작업 민간위탁용역(장기계속)』

설계변경(최종) 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 4.

강서도로사업소

도로보수과

『21/22년 제설작업 민간위탁용역(장기계속)』

설계변경(최종) 검토보고

21/22년 제설작업 민간위탁용역(장기계속) 추진과 관련하여 2022년도 2차분 정산및 최종 설계변경 사항을 보고드림

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 21/22년 제설작업 민간위탁용역(장기계속)

○ 계약금액 : ***************

**********************************

○ 계 약 자 : ************

○ 용역기간

- 총 차: 2021.11.11. ~ 2022.04.30.

- 1 차: 2021.11.11. ~ 2021.12.31.

- 2 차: 2022.01.01. ~ 2022.04.30.

□ 주요내용

○ 추가 과업 지시 반영

- 월드컵대교 인수에 따른 임차차량 1대증가 : 12대 ⇒ 13대

- 목동교 전진기지 안전사고 예방을 위한 안전관리자 2명 추가배치

- 전진기지 가설휀스 설치 반영(목동교)

○ 제설작업 실 근무상황 비용정산

- 제설비상 근무발령에 따른 대기및 작업시간 정산

- 1차 설계변경시 중복 계상된 공종 "제설작업 덤프(15톤) : 433시간"  최종 설계변경때 정산 반영

○ 주요 변경 내역

공종명	규격	단위	수 량			비 고
			당초	변경	증∙감
상황반장	주간	시간	120	223	증)103
제설작업원	주간	시간	300	486	증)186
교통 통제수	주간	시간	150	342	증)192
제설작업	덤프(15톤)	시간	750	0	감)750
덤프트럭 유류비	-	시간	750	1,239	증)489

□ 변경내역                                                                                                                                                                   (단위:원)

공종	당초	변경	증·감	비고
총차	***********	***********	************
1차	***********	***********	*
2차	***********	***********	************

□ 검토의견

○ 상기와 같이 제설용역 내용변경에 대하여 설계변경 후 정산처리하고자 합니다.

‣ 예산과목: 도로관리과, 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리, 제설대책추진, 시설비및부대비, 사무관리비

붙 임 : 설계변경 내역서 각1부.  끝.