문서번호	토목과-5577
결재일자	2022.4.26.
공개여부	부분공개
방침번호

주무관		토목팀장		토목과장		안전건설교통국장
남상현		성규상		代성규상		04/26 최연우
협조
	재무과장		송경택
	계약팀장		代장진희

★ ◉

옥수동 구릉지 엘리베이터 설치공사 건설폐기물 처리용역

준공기한 연기 검토 보고

2022. 4.

(토 목 과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 ☑ 공약(약속)사업 □ 계속사업 □ 인센티브/공모사업 □
소통분야 고려사항		●	구민		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	전문가		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	이해당사자		:		유 □ ( ) 무 ☑
기타 고려사항		일 자 리 □ 환경영향 □ 안 전 □ 유지비용 □ 바른 공공언어 □
		성 인 지 □ 취약계층 □ 장 애 인 □ 디 자 인 □ 갈등발생 요인 □
타자원 활용		●	중앙부처	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	서울시	:		유 ☑ ( 균형발전정책과 ) 무 □
		●	기업	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	민간단체	:		유 □ ( ) 무 ☑
언론홍보 계획		기획보도 □ 보도자료 □ SDTV □ 성동뉴스레터 □ 성동구소식지 □
		기 고 문 □ 전자행정서비스 □ S N S □ 기타 (리플릿 등) □ 없 음 ☑
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항

옥수동 구릉지 엘리베이터 설치공사 건설폐기물 처리용역

준공기한 연기 검토 보고

옥수동 구릉지 엘리베이터 설치공사 준공기한 연기에 따라 건설폐기물 처리용역 준공기한 연기를 검토하고 보고드림

□ 용역개요

○ 용 역 명: 옥수동 구릉지 엘리베이터 설치공사 건설폐기물 처리용역

○ 기    간: 2022. 3. 3. ~  4. 30.

○ 규    모: 건설폐기물 운반 162㎥ , 처리 372ton

○ 용 역 비: 금13,450,000원

○ 도 급 자: ㈜도성환경개발

□ 보고내용

○ 준공기한 연기

- 연기사유: ‘옥수동 구릉지 엘리베이터 설치공사’의 준공기한이 연장됨에 따라 폐기물 용역 준공기한 연장

- 준공기한: 당초 2021. 4. 30. → 변경 2022. 6. 10.

- 귀책사유: 성동구청

- 지체상금 부과 대상 여부: 미부과 대상

□ 조치계획

○ 상기와 같은 사유로 옥수동 구릉지 엘리베이터 설치공사 건설폐기물 처리용역 준공기한 변경을 시행 하고자 함

붙 임  1. 관련 방침서 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.  끝.