문서번호	한양도성도감-21130
결재일자	2022. 4. 26.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		도성보존팀장	한양도성도감과장
김창건		代김창건	04/26
			김홍진
협조

「한양도성 유산구역 보존을 위한 성벽 주변 절개지 지반보강 설계용역」 준공기한 연기 검토 보고

2022. 4.

문 화 본 부

(한양도성도감)

「한양도성 유산구역 보존을 위한 성벽 주변 절개지 지반보강 설계용역」 준공기한 연기 검토 보고

「한양도성 유산구역 보존을 위한 성벽 주변 절개지 지반보강 설계용역」계약자(설계자)로부터 준공기한 연기 요청이 있어 검토 결과를 보고드림

1		계약내용

○ 용 역 명 : 한양도성 유산구역 보존을 위한 성벽 주변 절개지

지반보강 설계용역

○ 계 약 자 : *******************

○ 계약금액 : ************************

○ 계약일자 : 2021.11.26.

○ 착수일자 : 2021.12. 1.

○ 준공기한 : 2021.12. 1.~ 2022. 4.30.

2		추진경위

○ 2021.12.21 : 관계전문가 현장자문회의 개최

- 주요내용 : 절개지 지반보강을 위한 정비 범위 및 방법 등 현장자문

○ 2022. 1.27. : 1차 한양도성 자문위원회 자문

- 주요내용 :  절개지 지반보강 대책, 보강방법 등 자문

○ 2022. 3.  4. : 관계기관(성북구) 업무협의회의 개최

- 주요내용 :  설계내용 설명, 범위 조정, 협의(협조)사항 검토·반영 등

○ 2022. 3.25. : 문화재청 설계승인 신청

3		준공기한 연기 및 검토 내용

□ 계약자 준공기한 연장 요청

○‘한양도성 유산구역 보존을 위한 성벽 주변 절개지 지반보강 설계용역’용역기간 연장 요청(설계자, 2022.4.25. 붙임 참조)

○ 준공기한 연장 요청 내용

- 계약기간 연장 : (당초)2021. 12. 1.~2022. 4. 30.

*****************************

**************************************

*******************

□ 준공기한 연기 요청 검토내용

○ 귀책소재 : 서울특별시

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

○ 연기사유

*****************************************************************

4		처리의견

○ 원활한 사업추진을 위하여 준공기한을 연기하고자 함

붙임  용역기간 연장 신청서류 1부.  끝.