문서번호	도시철도설비부-21261
결재일자	2022. 4. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		설비공사과장	도시철도설비부장
김태영		이광주	04/27
			김중영
협조

『별내선(8호선연장) 1,2공구 기계공사 (2차2회)』  기성검사 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 4

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

『별내선(8호선연장) 1,2공구 기계공사 (2차2회)』

기성검사 결과 보고

별내선(8호선연장) 1공구 정거장 기계공사(2차)에 대한 2회 기성검사를 실시하고 결과를 보고 드림.

※ 관련근거: 철도감리부-22-330호(2022.04.26.)와 관련임

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명: 별내선(8호선연장) 1공구 정거장 기계공사[2차]

□ 공사규모: L=3.78km, 정거장1개소, 환기구 4개소

□ 공사기간: 2020. 09. 02. ~ 2023. 12. 09.(총차)

2020. 09. 02. ~ 2021. 11. 30.(1 차)

2021. 12. 01. ~ 2022. 09. 30.(2 차)

□ 시 공 사: ㈜태건기계, ㈜유경엔지니어링

□ 감 리 사: ㈜한국종합건축사사무소

□ 계약금액: *************************************

[단위: 천원]

구 분	총 차	1차	2차	장 래
도 급 비	*********	*******	*********	*********
공 정 율	100%	3.27%	48.99%	47.75%
공사기간	2020.09.07. ~2023.12.09.	2020.09.07. ~2021.11.30.	2021.12.01. ~2022.09.30.	2022.10.01. ~2023.12.09.

Ⅱ		기성 검사 현황

□ 일   시: 2022. 4. 25.(월)

□ 장   소: 별내선 1,2공구 현장 및 건설사업관리단 회의실

□ 준공 검사자

- 기 술 지 원 기 술 인: ********

□ 입   회   자

- 도 시 철 도   설 비 부: ***

- 책임건설사업관리기술인: ***

- 현   장   대   리   인: ***

Ⅲ		공사 추진 현황

□ 기성율: 2차수 공사 대비 14.80 [%]

[단위: 천원]

구 분	계약금액	기 성 액			잔 액
		전회까지	금회기성	누 계
2차 1회	*********	*******	*******	*******	*********
공정율	100.0%	8.13	6.67%	14.80%	85.20%

□ 기성금 신청현황

[단위: 천원]

구 분	2회 2차 기성	기수령액	선금공제	실지급 금액
계	*******	******	******	*******
태건기계	*******	******	******	*******
유경엔지니어링	*******	*	*******	*******

*******************************

□ 주요준공 내역

품 명	규격	총차수량	1차수량	2차수량	금회수량	잔여수량
덕트 설치 (변전실, 공조실-1)	****	*****	***	*****	***	*****
	****	*****	***	*****	***	*****
	****	*****	***	*****	***	*****
	****	****	***	****	***	****
배관 설치 (승강장)	***	****	***	****	***	****
	***	****	***	****	***	****
	***	****	***	****	***	****
전선관 설치 (승강장)	***	*****	*****	*****	***	*****
	***	*****	****	*****	***	*****
	***	****	****	****	***	****
	***	*****	****	****	***	****

Ⅳ		건설사업관리기술인 검토의견

별내선(8호선연장) 1,2공구 정거장 기계공사(2차) 준공검사를 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 등에 의거 제반 관련 서류를 검토한 결과, 기성검사조서와 같이 적합하게 시공됨.

Ⅴ		보고자 의견

별내선(8호선연장) 1,2공구 정거장 기계공사(2차2회) 기성검사와 관련 책임건설사업관리기술인 검토의견을 확인한 결과, 적합하게 시공되었다고 사료됨

붙임: 별내선(8호선연장) 1,2공구 정거장 기계공사(2차2회) 기성검사 결과보고 1부.  끝.