문서번호	총무과-21512
결재일자	2022. 4. 27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	총무과장
조성만	강건영	04/27
		박신근

관리인숙소(103호) 소규모 환경개선 계획

2022. 4.

서울대공원

(총 무 과)

관리인숙소(103호) 소규모 환경개선 계획

입주기간이 만료된 관리인숙소 1가구를 소규모 환경개선을 시행하여 입주자의 쾌적한 생활환경을 제공하고 관리인숙소 관리에 만전을 기하고자 함.

1		추 진 근 거

□ 서울대공원 관리인숙소 운영규정 제8호(유지보수)

□ 관리인숙소 운영 및 규정 변경 계획(총무과-1556('22.2.14.))

2		추진 개요

□ 대 상 지 : 관리인숙소(103호)

❍ 면  적 : 20㎡

❍ 구  조 : 복층형태(화장실 2곳, 방3개)

1층	2층

□ 주요내용 : 관리인숙소(20평) 내부 소규모 환경개선

3		세부추진계획

□ 작 업 명 : 관리인숙소(103호) 소규모 환경개선 시행

□ 기    간 : 2022. 4. 27. ~ 5. 1.(5일)

□ 작업내용

구 분	내 용	비 고
철 거	몰딩 및 도배·장판 철거
목 공	몰딩 등 기타 작업
수장작업	도배(장판), 타일, ABS문 필름 시공

□ 지출방법 : 일상경비

□ 예    산 : 920만원(구백이십만원, 부가세 포함)

❍ 예산항목 : 서울대공원 총무과, 행정운영경비(서울대공원 총무과), 기본경비, 일반운영비, 공공운영비

4		추 진 일 정

❍ 전기 사전작업 시행  : 2022.4.27. ~ 2022.4.27.

❍ 철거 및 미장 작업 시행 : 2022.4.28. ~ 2022.4.28.

❍ 내부 인테리어 작업 시행 : 2022.4.29.~ 2022.5.1.  끝.