문서번호	도로시설과-21446
결재일자	2022. 4. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설기획팀장	도로시설과장
정문수		代정문수	전결 04/27
			임대운
협조	도로기전팀장		代채충일
	도로시설팀장		조창길

우기대비 도로시설물 안전점검 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 4.

안전총괄실

(도로시설과)

우기대비 도로시설물 안전점검 시행계획

여름철 우기대비 도로시설물에 대한 안전점검을 시행하여 시민불편 및 안전사고 예방 등 취약시기 안전관리에 만전을 기하고자 함

1		추진근거

❍ 2022년 도로시설물 안전점검 추진계획(도로시설과-94호, 2022.01.04.)

❍ 2022년 지하차도 배수시설 일제점검 계획(도로시설과-2017호, 2022.02.23.)

❍ 2022년 여름철 종합대책 수립계획 알림(기획담당관-20795호, 2022.04.05.)

2		점검개요

❍ 대상 : 도로시설물 599개소

(단위 : 개소)

구 분	계	한강 교량	일반 교량	고가 차도	입체 교차	터널	지하 차도	복개 구조	언더 패스	공동구
계	599	21	237	83	41	36	117	50	6	8
도로시설과 (서울시설공단)	168	1	59	22	31	4	36	1	6	8
교량안전과	53	20	19	14	-	-	-	-	-	-
도로사업소	378	-	159	47	10	32	81	49	-	-

※ (서울시설공단) 자동차전용도로 12개 노선(168.64km) 포함

❍ 점검기간 : 2022. 4.28.(목) ~ 2022. 5.13.(금)

❍ 점검방법

- 도로시설물 관리주체별 자체 점검계획 수립 후 점검 시행

․ 점검기관 : 교량안전과, 6개 도로사업소, 서울시설공단(도로시설처, 공동구관리처)

- 도로시설물 부재별 점검사항(기전시설물 포함)에 의거 점검실시

- 시설물 유형별 안전점검을 착안하여 위험구간 집중점검

-“시설안전자문단”활용 합동점검 실시 : 관리대상 총 199개

※ 1종 시설물 119개소, 2종 교량 66개소, 3종및법정외(C등급 이하 6개소), 공동구 8개소

❍ 주요 점검사항

구 분	점 검 사 항
공통사항	- 우기대비 취약 도로시설물 관리 상태 - 지반(포장) 침하, 옹벽 등 전도위험 도로시설물 조사 - 도로파손(포트홀, 소성변형 등) 등 포장상태 이상 유무 - 맨홀, 신축이음부, 빗물받이 및 측구 주변 파손 유무 - 기타 도로시설물 인접 위험물 적치 및 시민불편사항 등
도로시설물	- 시설물별 취약부재 이상 여부 확인 - 교량(복개구조물 등) 배수시설(배수구 등) 파손, 체수, 막힘 등 - 교량받침 거동, 터널 갱구부 비탈면 및 옹벽 상태, 배수 상태
기전시설물	- 터널 및 지하차도 : 방재설비 작동 및 유지관리 상태 - 환기시설 및 감시시설(CCTV 등) 정상 작동 여부 - 조명 및 소화전 설비 유지관리 상태, 가로등 점등 상태 등
공 동 구	공동구 내부 안전관리시설 이상 유무 - 구조물 누수, 외부인 출입통제시설 관리상태 등
자동차전용도로	- 전용도로 도로소파 및 도로부속물 손상 등 시민불편사항 교통안전(관리)시설물 등 관리상태 등

❍ 점검결과 지적사항에 대하여 신속한 보수ㆍ보강 등 정비 추진

- 시민생활 불편과 시설물 안전과 직결되는 사항은‘기동반’및‘일상유지보수공사' 등을 활용하여 우기 전까지 우선적으로 정비 실시

- 구조물 손상(콘크리트 균열, 누수, 열화, 전면포장 등) 등 정비에 상당한 시일이 소요되는 경우 정비계획 수립 후 시행

- "2022년 지하차도 배수시설 일제점검" 지적사항에 대한 조치결과 확인

- 안점점검 결과는 "안전점검 통합관리시스템"에 등재 및 사후 관리

3		행정사항

❍ 관리주체별 안전점검 및 조치결과 제출 : 2022. 5.27.(금)까지

붙임  1. 도로시설물 안전점검(총괄) 1부.

2. 도로시설물 점검결과 집계표 1부.

3. 도로시설물 안전점검 보고서 1부.

4. 도로시설물 부재별 점검사항(점검체크리스트) 1부.