문서번호	방재시설부-21672
결재일자	2022. 4. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	조경시설과장	방재시설부장
이기면	현학범	04/27
		이동훈

조경공사 실정보고서 검토결과

(신상도 지하차도 확장공사)

방재시설부

(조경시설과)

조경공사 실정보고서 검토결과

「신상도 지하차도 확장공사」 책임건설사업관리기술인으로부터 설계변경의 필요성을 설명하는 실정보고서가 접수되어 검토하고 그 결과를 보고드림

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 신상도 지하차도 확장공사(연장 324m)

○ 위    치 : 동작구 상도동 159-21~207-5번지

○ 기    간 : 2007. 12. 31. ~ 2022. 4. 30.

○ 공 사 비 : 19,792백만원(조경 : 136백만원)

○ 건설사업관리 : 극동엔지니어링(주)

○ 도 급 자 : (주)한백종합건설

□ 보고개요

○ 보고일자 : 2022. 4. 15.

○ 보 고 자 : 책임건설사업관리기술인(**************)

※ 시공사 실정보고(2022. 4. 14.) → 감리단 보고(2022. 4. 15.) → 우리 본부

○ 보고요지

· 교통규제심의 결과에 따라 차선 감소되어 녹지대 면적 증가

· 자전거도로 신설로 인한 녹지대 면적 축소

· 분전반 차폐 등을 위한 식재 추가

· 지하차도 진입부 선형변경으로 인한 식재물량 변경 및 위치 조정

· 보고내용과 같이 승인될 경우 공사비 변경사항(3,850천원 감소)

□ 사항별 검토결과

① 교통규제심의에 따라 터널 상부의 차로수가 감소하여 녹지대 면적 증가

- 변경내용 : 1개 차선 감소로 인하여 증가되는 녹지대(23.08㎡)에 관목류 265주 추가 식재

(증가수량 : 조팝 120주, 화살 40주, 영산홍 55주, 산철쭉 50주)

- 변경사유 : 교통규제심의 결과(경찰청 교통관리과-27753, '21.12.7.)

- 검토결과 : 차로수 감소에 따라 녹지대 면적 추가로 관목을 식재하는 사항으로 바람직함

② 횡단보도 옆 자전거도로 신설에 따라 녹지대 면적 축소

- 세부내용 : 자전거도로가 신설되어 녹지대 면적 축소됨에 따라 식재 수량 감소

(감소수량 : 산딸나무 3주, 왕벚나무 3주. 산철쭉 50주, 화살나무 100주)

- 변경사유 : 교통규제심의 결과 횡단보도 옆 자전거도로 신설

(서울시 경찰청 교통관리과-27753(2021. 12. 7.))

- 검토결과 : 자전거도로 신설에 따라 기존 녹지대 폭이 축소되여 식재 수량이 감소되는 사항으로 타당함

③ 분전반 차폐를 위한 식재 추가

- 세부내용 : 녹지대 내부에 설치되는 지하차도 분전반 차폐를 위하여
화살나무 155주 식재(교목은 식재 위치 조정)

- 변경사유 : 분전반으로 인한 경관상 차폐 필요

- 검토결과 : 경관을 고려한 사항으로 타당함

④ 지하차도 진입부 선형변경으로 인한 물량변경 및 식재위치 조정

- 세부내용 : 벽면녹화 일부 구간(3개소)과 하부 화단 삭제하고 벽면녹화 식재기반에 맥문동만 식재

(관목 430주 및 담쟁이덩굴 250본 감소, 맥문동 730본 증가)

- 변경사유 : 진입부 옹벽구간 도로선형에 따른 유효보도폭(2m) 확보 필요

- 검토결과 : 「도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙」에 따른 유효보도폭 확보를 위한 것으로 불가피함

⑤ 보고내용과 같이 승인될 경우 공사비 3,850천원 감소

- 물량별 증감

공 종		단위	수 량			단 가(원)	증 감 액(원)	비고
			전	후	증감
합 계							감) 2,802,005
식재공	왕벚나무	주	14	11	감) 3	895,671	감) 2,687,013
	산딸나무	주	8	5	감) 3	154,912	감) 464,736
	화살나무	주	500	595	증) 95	12,656	증) 1,202,320
	영산홍	주	730	555	감)175	5,476	감) 958,300
	조팝나무	주	740	660	감) 80	4,731	감) 378,480
	담쟁이	본	1,280	1,030	감)250	3,057	감) 764,250
	맥문동	본	850	1,580	증)730	1,324	증) 966,520
	잔디	㎡	200	223	증) 23	12,258	증) 281,934

- 공사비 증·감내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증〮 · 감		비 고
합 계	136,620,000	132,770,000	감)	3,850,000
직접공사비	105,175,729	102,373,724	감)	2,802,005
간 접 비	19,024,271	18,326,276	감)	697,995
공 급 가 액	124,200,000	120,700,000	감)	3,500,000
부가가치세	12,420,000	12,070,000	감)	350,000
도급공사비	136,620,000	132,770,000	감)	3,850,000

- 검토결과 : 물량변경에 따른 총공사비 변경(신규비목 없음)

□ 처리의견

○ 교통 관련 심의 결과, 공종간 간섭 조정, 유효보도폭 확보 등을 위한 것으로 변경되는 사유 및 물량이 적정하다고 판단함

붙임  조경공사 관련 실정보고 검토보고(**************) 1부.