주무관		토목팀장		토목과장	안전건설교통국장
이성환		성규상		代성규상	04/27 최연우
협조
	재무과장		代강은진
	계약팀장		홍혜영

문서번호	토목과-5644
결재일자	2022.4.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

★ ◉

「장터길 확장 공사」 준공기한 연기 검토 보고

2022. 4.

(안전건설교통국 토목과)

「장터길 확장 공사」

준공기한 연기 검토 보고

우리 구 역점사업으로 시행중인 ‘장터길 확장 공사’관련 주민 편익을 위하여 아래와 같이 준공기한을 연기하고자 함

□ 공사개요

❍ 공사규모: 도로확장 폭 8m→15.7m, 연장 110m

❍ 공사기간: 총차 2020. 10. 20. ~ 2022.  4. 30.

2차 2021.  7.  1. ~ 2022.  4. 30.

❍ 도 급 액: 총차 1,019,018천 원(시비)

2차   842,039천 원

❍ 시 공 사: 오송종합건설 주식회사 대표 곽명기

□ 보고내용

❍ 준공기한 연기 검토

- 도로확장공사 완료 및 준공식 개최(’22.3.30.)에 따른 도로 (보행로) 개통으로 많은 주민들이 이용하고 있어,

- 교통량 비교분석 및 주민이용실태 모니터링 후 보완사항 조치와 철거건물 보수 완료시 주변 도로 정비를 위하여 준공기한 연기 필요

□ 조치계획

❍ 준공기한 연기 시행(폐기물 처리 용역 포함)

- 당초: ’22. 4. 30. → 변경: ’22. 6. 30.

- 연기에 따른 귀책소재: 성동구청

- 지체상금 부과 대상여부: 미부과 대상

❍ 준공기한 연기 후 도로 이용실태 분석 및 추가 주민요구사항 반영 시행

붙임  준공기한 연기의뢰서 각 1부.