문서번호	보행정책과-12353
결재일자	2021. 10. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	보도관리팀장	보행정책과장
조시형	유은중	10/13 김인숙
협 조

『투수블록 투수성능 유지관리 용역』계약 변경 보고

2021. 10.

도시교통실

(보행정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

『투수블록 투수성능 유지관리 용역』계약 변경 보고

『투수블록 투수성능 유지관리 용역』추진 과정에서 발생한 내역 변경 등을 반영하여 계약을 변경하고함

1		용역개요

○ 용역명 : 투수블록 투수성능 유지관리 용역

○ 계약번호 : 20210802F04 - 00

○ 수행기관 : ㈜대일텍

○ 용역기간 : 2021. 8. 9. ~ 11. 6.

○ 주요내용

- 투수블록 투수성능 회복을 위한 공극회복장비 운용

- 사업장내 보행안전도우미 배치 및 안전시설 설치 등

2		변경 내용

○ 총 용역금액 변경 : 내역서 일위대가 정정 반영 (제비율 적용 후)

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증 감
금 액	51,500	49,381	△ 2,119

○ 공종별 변경 내용

구분	공종	수량	단위	합계		재료비		노무비		경비		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액
당초	********	**	*	********	**********	**	***	*******	**********	********	**********
변경	********	**	*	*******	**********	**	**	*******	**********	**	**

3		행정 사항

○ 변경계약 의뢰 (보행정책과 → 재무과)

붙임 1. 변경계약 산출내역서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.