문서번호	건축부-21422
결재일자	2022. 4. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		의료시설과장	건축부장
손남기		정채문	04/15
			代정채문
협조

-시립마포 실버케어센터 건립공사-

임시사용승인기간 연장 검토보고

2022. 4

도시기반시설본부

(건   축   부)

『시립마포 실버케어센터 건립공사』

임시사용승인기간 연장 검토보고

「시립마포 실버케어센터 건립공사」와 관련하여 임시사용승인기간연장요청 보고 건에 대하여 아래와 같이 검토하고 보고드림.

************************************************

***********************************

Ⅰ		임시사용승인기간 연장 개요

○ 위    치 : 서울특별시 마포구 백범로 21 (舊, 한국산업인력관리공단 )

○ 건축규모

- 시립마포 실버케어센터: 지하2층/지상4층 연면적 12,271㎡

- 스마트 팜(온실): 지상1층, 83.20㎡

********************************************************

***************************************

*********

**************************************

ⅱ		추 진 경 위

○ ‘19. 04. 15. : 공사착공

○ ‘19. 05. 15. : 설계용역 준공

○ ‘19. 08. 06. : 서울창업허브단지 시험동 철거 완료

○ ‘20. 02. 20. : 골조공사 완료

○ ‘21. 12. 31. : 임시사용승인 처리(`22.4.14.일한)

○ ‘22. 03. 11. : 공사기간 연장처리(`'22.3.14→'22.6.14)

○ ‘22. 4월 현재. : 추가공사 중(창호확장 등)

Ⅲ		임시사용승인 기간연장 검토

○ 관련 근거

- 건축법제29조(공용건축물에 대한 특례) 및 동법시행령 제17조(임시사용승인 신청 등)

- 건축부-21247(`21.12.31) 공용건축물 임시사용승인 처리

******************

***************************************

***********************

******************************************

*****************************************************

*************

*******************************************************************************************

○ 적정여부 검토

- 임시사용승인 관련 관계법령에 따른 구비서류(신청서, 조서, 감리보고서, 각종필증 등) 최초 임시사용승인 시 기 제출됨

Ⅳ		건설사업관리단 검토 의견

○ 임시사용승인 신청에 있어 설계도서 등 관련사항을 검토한 결과 적정하게 시공되어 임시사용승인 가능함

Ⅴ		처리의견

○ 건설사업관리단으로부터 제출된 검토보고 내용이 적정하므로 임시사용승인기간 연장 처리하고, 관계기관(부서)에 통보하고자 함

붙임 : 임시사용승인기간 연장요청 등 관련서류. 끝.