문서번호	급수운영과-22097
결재일자	2022. 4. 29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
김희철		양재덕	04/29
			김종원
협조

현장실정보고(송파동 외 11개동)

2022. 4.

강동수도사업소

급수운영과

현장 실정 보고(송파동 외 11개동)

「송파동 외 11개동 상수도공사」와 관련하여 사토장 변경 실정보고서가 제출되어 이를 검토하고 보고합니다.

Ⅰ		현 황

상수도공사 현황

○ 공 사 명: 송파동 외 11개동 상수도공사(장기계속단가계약)

○ 공사개요: D=15〜300㎜, L=866m

○ 공사기간: 2021. 6. 21.~2022. 6. 30.

○ 계약금액: 624,626,980원

○ 도 급 자: 진아기계 대표 문용식

※ 실정보고서 제출(사토장 변경)-(2022.04.28.)

Ⅱ		보 고 내 용

사토장 변경

○ 당초 경기도 양주시 고읍동 14-2로 잔토를 운반 및 처리하였으나, 사토장 운영중단으로 인해 경기도 양평군 강상면 화양리 770번지로 변경하고 운반거리 변경에 따른 운반비를 변경코자 함

(운반거리 38km → 46km)

Ⅲ		조치계획

상기와 같은 사토장을 변경사항을 설계변경에 반영하여 처리토록 계약업체에 통보코자 합니다.

붙임  운반비 산출 내역서 1부.  끝.