코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서 울 특 별 시
수신	내부결재
(경유)
제목	회의 결과 보고((가칭)서울큐브 재건축사업)

「서울애니메이션센터 재건축사업」교통영향평가 및 (공사)설계용역 진행에 따른

관계자 실무회의를 개최하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 회의일자 : '22. 4. 22(금), 14:00 ~ 17:30

나. 장    소 : 7층 회의실(서소문2청사)

다. 참 석 자

ㅇ 서 울 시 : (미디어콘텐츠산업과)애니산업지원팀장, 담당주무관

ㅇ 설 계 자 : (주)공간건축사사무소 ************

ㅇ 교통영향평가 대행자 : 우경이앤씨(주) *****

ㅇ 감 리 자 : 책임건설사업관리기술자 ***, 건축건설사업관리기술자 *****

라. 주요 회의내용

1) 교통영향평가 보고서 개선방안 검토 및 협의

*************************************

***********************************************

************************

*************************************************

***************

2) (설계용역)예정공사비 증액(초안) 협의 **********************

******************************************

*********************************************************************************************************************

ㅇ 주요 변경사유

- 공사 착수시기 지연에 따른 물가상승률(노임, 자재비 등) 및 과업내용****에

따른 실제 공사면적 증가

************************************************************************************************************

- 고용개선지원비 신설규정 적용에 따른 공사비 증가 등

※「서울특별시 지역건설산업 활성화에 관한 조례」개정('21.5.20 개정)

마. 회의결과(처리의견)

ㅇ (교통영향평가)현재, 진행 중인 설계안을 바탕으로 사업시행에 따른 교통상의

제반 문제점이 개선될 수 있도록 중점적 분석을 통한 교통개선대책(교통

소통 및 안전 등) 검토

ㅇ (공사비 증액)설계용역 일정(실시설계 VE 등)에 지장 없도록, 도기본 실시설계

공사비 내역 산정 즉시, 증액 가능여부 사전 재 협의

*********************************

바. 향후계획

ㅇ 교통영향평가위원회 심의         : 5. 23(월) 예정

***************************************************

**************************************************

ㅇ 공사비 증액 검토(도기본 요청시)  : 5.23(월) ~ 27(금) 예정.  끝

주무관	박춘복		애니산업지원팀장	김성미		미디어콘텐츠산업과장	전결 04/29
은용경
협조자
시행	미디어콘텐츠산업과-21277	(	2022.04.29	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 서소문로 124, 서소문2청사 6층 (서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-9224	/전송	02)768-8969	/	pcb7102@seoul.go.kr	/	부분공개(5)