문서번호	교통운영과-7115
결재일자	2019.4.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		BRT팀장	교통운영과장
류근호		전태호	04/24 강진동
협조

중앙버스전용차로 흐름개선사업 예산 배정 검토 보고

2019. 4.

도시교통실

(교통운영과)

중앙버스전용차로 흐름개선사업 예산 배정 검토 보고

중앙버스전용차로 흐름개선사업 관련 설계변경 등에 따른 사업부서 예산 감배정 및 재배정 요청에 대한 검토보고 임.

□ 검토 근거

○ 동부시장교차로 흐름개선사업 예산 감배정 요청(중랑구 교통행정과-23925, ‘19.3.29)

○ 동부시장교차로 흐름개선사업 예산 추가 재배정 요청(성동도로사업소 기전과-1888, ‘19.4.18)

□ 주요 변경사항

○ 가로등 이설 취소에 따른 예산 감배정(감15,880천원)

- 횡단보도 위치 변경으로 인한 가로등 이설(1개소) 불필요

○ 신호등 추가 설치에 따른 예산 재배정 요청(증73,910천원)

- 동부시장교차로 간격이 멀어 운전자의 시인성(신호등) 향상을 위해 차량 보조신호등 2개소(제어기 포함) 신설에 따른 예산 추가 소요

※ 서울특별시지방경찰청 교통규제심의 결과 반영(교통관리과-5997, ’19.3.19)

□ 예산 조정 내역

부 서 명	당 초 (기배정액)	변 경 (총사업비)	증 감	비 고
중랑구 교통행정과	15,880천원	-	감 15,880천원	가로등
성동도로사업소 기전과	75,790천원	149,700천원	증 73,910천원	신호등

□ 검토 의견

○ 가로등 이설 취소와 운전자의 신호등 시인성 향상을 위한 차량 보조신호등 추가 설치가 요구됨에 따라 예산 감배정 및 재배정하도록 함.

□ 조치 계획

○ ’19. 4.  : 조속한 사업 시행을 위한 예산 감배정 및 재배정

붙임: 예산 감배정 및 재배정 요청 관련 자료. 1부.  끝.