문서번호	정보통신보안담당관-17616
결재일자	2020.8.19.
공개여부	부분공개(2 5)
방침번호

				시 민
★주무관	공공와이파이팀장	정보통신보안담당관		스마트도시정책관
김화현	도찬구	공병엽		08/19 이원목
협 조
	SNet팀장		서재호
	주무관		이용철

- 미래 혁신적 스마트도시 인프라 기반 확보를 위한 -

2021 스마트서울 네트워크(S-Net) 추진계획

2020. 8.

스마트도시정책관

(정보통신보안담당관)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□	과기정통부 무선데이터
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□	S-Net 자문위원회
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□	ISP 경제성 분석
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□	과기정통부 25 자치구
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□	통신격차 해소
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	■	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

목    차

Ⅰ.	추진개요			1
Ⅱ.	운영현황			3
Ⅲ.	추진실적			4
Ⅳ.	세부 추진계획			5
	□	유·무선 통신인프라 구축		5
		➀	유무선 통신인프라 구축(3차)	5
		②	S-Net 구축 공사․감리	7
	□	공공와이파이 확대 설치·운영관리		8
		➀	공공생활권 공공와이파이 확대 설치(3차)	8
		②	복지시설 공공와이파이 확대설치	9
		③	市 직영공원內 공공와이파이 설치 확대	10
		④	공공와이파이 안정적 운영관리(유지보수 용역)	11
	□	민관 거버넌스 협력 강화		12
		➀	S-Net 민관거버넌스 운영	12
		②	스마트서울 네트워크(S-Net) 홍보 강화	13
Ⅴ.	소요예산			14
Ⅵ.	행정사항			16

- 미래 혁신적 스마트도시 인프라 기반 확보를 위한 -

2021 스마트서울 네트워크(S-Net) 추진계획

서울 전역 모세혈관식 공공 정보통신망을 구축하여 시민의 통신기본권을 보장하는 공공와이파이(WiFi) 및 사물인터넷(IoT)서비스 제공하기 위한 ‘21년 스마트서울 네트워크(S-Net) 추진계획를 수립․시행코자 함.

Ⅰ		추진개요

□ 관련근거

○ 국가정보화기본법 제31조(정보격차 해소시책의 마련)

○ 전기통신사업법 제64조(자가전기통신설비의 설치)

○ 스마트도시 조성 및 산업진흥 등에 관한 법률 제3조의2(국가등의 책무)

○ 스마트도시 및 정보화조례 제19조(정보접근․이용보장), 제20조(정보격차해소)

○ 민선7기 공약 ’와이파이 소외없는 서울‘ 조성(’18.7)

○ 스마트서울 네트워크(S-Net) 구축계획(’20.1.31, 시장방침 제26호)

□ 국내동향

○ 디지털뉴딜사업 : 과기정통부(대행기관 – 한국정보화진흥원)

- 사업기간 : 2020~2022년까지 공공와이파이 41,000개

- 소요예산 : 2,959억원(추정액)

- 설치장소 : 학교, 시내․마을버스, 교통시설, 보건․복지시설, 체육시설 등

- 매칭비율 : 국비․통신사 7(420만원):3(180만원) - 투자비

- 기타사항 : 기존 노후 공공와이파이를 성능이 우수한 와이파이로 교체

○ 공공와이파이의 제공 및 이용활성화에 관한 법률(안) 발의 … 국회

- 대표발의 : 노웅래(과학기술정보방송통신위원회) - 발의일 ‘19.9.24

- 제정목적 : 국민의 공공와이파이 이용권 보장, 제공과 이용활성화 지원

- 주요내용 : 공공와이파이 기본계획, 공공와이파이 위원회, 공공와이파이

통합관리센터, 공공와이파이 품질기준 및 기술표준화 등(3장 15조)

○ ‘전국 무료 와이파이 구축‘ 총선 공약 … “데이터 0원 시대“

- 출처 : The Fact(‘20.1.15) - 더불어민주당 총선공약(1호)

- 목적 : 특정계층 관계없이 모든 국민에게 혜택, 통신비 절감

- 대상 : 시내버스, 학교, 터미널, 문화시설, 체육시설, 관광시설, 복지시설 등

- 계획 : ‘22년까지 공공와이파이 53,000개 구축, 투자비 5,780억원

○ 과기정통부 : 공공와이파이 확대구축 추진(’19년~’20년)

- 협약체결 : ‘19.7.05.(16개 지자체 ↔ 한국정보화진흥원 ↔ 이통3사)

- 약정기간 : ‘25.6.30.(5년) - 약정기간 내 해지시 위약금 부과

- 설치대상 : 교통시설, 교육시설, 보건시설, 복지시설, 문화․체육․관광시설

- 추진방식 : 설치․유지관리(과기부/통신사 5:5), 회선비–지자체(월 33천원)

- 추진계획 : 12,888개소(2019년 7,817개소, 2020년 5,071개소)

□ ************************************

○ 5G보다 빠른 차세대 와이파이(WiFi) 7로 진화

- 기 술 명 : IEEE 802.11 be (WiFi7 - 30Gbps, 5G - 20Gbps)

- 주 파 수 : 2.4Ghz/ 5Ghz/ 6Ghz (WiFi6 2.4Ghz/ 5Ghz)

- 개발목표 : 차세대 초고속․초용량․초저지연 성능구현(상용화 : 2023)

※ 과기정통부 : WiFi 7 상용화를 목표로 추진 중(SKT 컨소시엄, ‘19.5월)

Ⅱ		운영 현황

□ 자가 정보통신망 : 총 연장 4,435㎞                  (단위 : ㎞)

*	*****	25개 구청			비고
		소계	행정망	CCTV망
*****	***	*****	*****	*****

□ 공공 와이파이 : 21,426대                            (단위 : AP댓수, ‘19.12.31.)

구분	고정형 13,844대								이동형 7,582대
	소계	주요거리	전통시장	광장․공원	문화관광	버스정류소	복지시설	공공기관	시내버스	마을버스
실내형	6,424	20	151	88	934	0	2,294	2,937	6,000	1,582
실외형	7,420	2,330	666	2,069	82	167	4	2,102
합 계	13,844	2,350	817	2,157	1,016	167	2,298	5,039	6,000	1,582

□ 區別 공공와이파이 운영현황 : 13,844대   (단위 : AP댓수, ‘19.12.31.)

***	**	***	**	****	**
******	*****	****	***	*****	***
*****	***	*****	***	*****	***
*****	***	*****	***	*****	***
*****	***	*****	***	*****	***
*****	***	****	***	*****	***
*****	***	*****	***	*****	***
*****	***	*****	***	*****	***
*****	***	****	***	**	****
*****	***	*****	***	**	*******

※ 별도 : 이동형 7,582대(시내버스 6,000대, 마을버스 1,582대)

Ⅲ		추진실적

□ 스마트서울 네트워크(S-Net) 구축계획(시장방침 26호, ’20.1.31)

○ 3개분야 10개 추진과제, WiFi6 – 신규․교체/ 실내․실외

□ 와이파이6 장비 성능평가시험(BMT) 실시(’20.5.18~21)

○ 장소 및 참여업체 : 서울월드컵경기장(마포구), 7개업체 11개 품목

○ 최신 기술적용(품질, 용량, 보안성)이 검증된 우수한 WiFi6 제품 선정

○ 와이파이 자격을 갖춘 모든 제조 생산업체게게 공정한 사업참여기회 보장

□ S-Net 자문위원회 개최 – 3회(2.16/ 5.27/ 7.22)

○ 발표건명 : 서울전역에 무료 공공와이파이 … 통신기본권 전면 보장

○ 보도현황 : 총 96건(신문 17건, 방송 9건, 인터넷 70건)

□ S-Net 온라인공청회 개최(’20.5.20)

○ 주제 : S-Net과 함께 The 스마트해지는 시민의 삶

○ 참석 : 316명(시장님, 행정자치위원장, 구로구청장, 이효성 전 방통위원장)

○ 전국 최초로 비대면 온라인공청회 성공적 개최 – 새로운 모델 최초 정립

□ S-Net 1차 사업대상 자치구 선정(’20.6.3)

○ 선정절차 : 수요조사(區) → 내부검토(市) → 위원회 결정 → 협약체결(市․區)

○ 협약체결 : S-Net 대상 자치구 선정 後, S-Net 사업추진 前 협약체결

○ 선정절차 : 재정여건, 정보격차, 추진의지, 현장여건 실시설계 등 고려

○ 선정결과 : 5개 자치구(성동구, 구로구, 은평구, 강서구, 도봉구)

□ S-Net 조기 구축계획(’20.6.8) 및 추경예산 반영(’20.6.30)

○ 사업기간 : ’20.8~12월(연내 사업완료 및 예산집행 완료)

○ 추진목표 : 14개 구청, 유무선통신망 641㎞, 공공와이파이 6,890대

○ 소요예산 : 490억원 (유무선통신망 210억원, 공공와이파이 280억원)

Ⅳ		세부 추진계획

1		유·무선 통신인프라 구축

①		유·무선 통신인프라 구축(3차)

시민 공공생활권역에 모세혈관식 차세대 유무선 통신인프라 구축으로 공공와이파이, 사물인터넷 및 지능형 CCTV 확대로 미래 스마트도시 인프라 기반 확보

□ 추진방향

○ 통신비 절감뿐 아니라 유사시 화재, 지진, 교통, 환경 등 서비스 제공

○ 기관별 산재한 개별통신망의 통합관리로 규모의 경제를 통한 예산절감

○ 임대망 사용 기관·부서를 자가 통신망으로 전환하여 행정효율 향상

□ 추진목표 : (2019) 4,435㎞ → (2021) 5,954㎞, 증 1,519㎞

□ 운영현황 : 총길이 4,435㎞                          (단위 : ㎞)

*	*****	25개 구청			비고
		소계	행정망 (구청 ↔ 주민센터)	CCTV망 (주민센터 ↔ CCTV)
*****	***	*****	*****	*****

※ *******************************************************************

□ 추진계획 : (2020.12.) 5,408㎞ → (2021.8.) 5,954㎞, 증 546㎞

구분	계	기존	1차 사업 (2020.9)	2차 사업 (2020.12)	3차 사업 (2021.8)
설치길이(㎞)	****** ********	******	****** ******	****** ******	****** ******
사업비(백만원)	******		*****	******	******

○ *********************************

********************************************

○ 市․區 간 최근접한 통신망간 연계 → 網 이중화, 공사비 절감 등

○ CCTV 및 WiFi 장비설치를 위한 광케이블 신규 포설(546㎞)

□ 주요 설계기준

○ 광케이블 포설 : 1㎞당 접속 10개소, 함체 10개, 광분배함 설치

○ 광케이블 설계 : 신규 및 임대망 → 자가망 변경부분만 반영하고 기 운영중인 자가망(용량부족 등) 교체 및 철거비는 제외

○ 광케이블은 확장성 고려 24Core 이상, 기존 광케이블(8, 12 Core)은 철거를 지양하고 최대한 활용할 것.

○ 가공 기준이며 가공부분에 한해 통신선 정비 및 라벨 부착(100M)

○ 원가계산서 작성 : 물품은 별도계상, 순공사원가(재료비 ) 제외

- 노무비 : 정보통신 품셈기준, 인건비 : 노임단가 기준, 경비 – 법정사항 준수, 간접노무비/이윤 : 예산범위내에서 자체 조정

□ 소요예산 : 17,852백만원

○ 신출내역 : 32,695,320원 × 546㎞ = 17,851,644,720원

□ 향후일정

○ ‘21.1월 ~ 2월	: 실시설계 자료검증

○ ‘21.3월 ~ 4월	: 소요예산 및 산출물량 확정

○ ‘21.5월	: 예산재배정, 사전절차 이행

○ ‘21.6월	: 사업발주 및 계약

○ ‘21.7월 ~ 9월	: 3차 사업시행 및 완료

②		S-Net 구축 공사․감리

서울시 공공생활권 전역에 스마트서울 네트워크(S-Net) 구축공사의 시공감독, 품질 및 안전관리를 위해 정보통신공사 전문기관에 감리 시행

□ 관련근거 : 정보통신공사업법 제8조, 동법시행령 제8조

□ 추진계획

***********************************

***********************

**********************

***************************************

□ 과업내용

○ 공사계획 및 공정표 검토, 준공도서 검토 및 준공확인 등

○ 사업자가 작성한 시공상세도면(설계도서, 시공도면)의 검토ㆍ확인

○ 설계도면이 현장조건에 적합한지 여부와 시공가능성 등 사전검토

○ 공사가 설계도서 및 관련규정에 적합하게 행해지고 있는지에 대한 확인

□ 추진방안 : 市 통합감리

○ 정보통신공사업법 시행령에 따라 효율적 사업수행을 위해 통합 감리시행

○ 감리비 산정은 비용측면에서 저렴한 정보시스템 감리 기준으로 산정

□ 소요예산 : 150백만원

□ 향후일정

○ '21.1월 ~ 4월 : 사전절차, 계획수립 및 계약체결

○ '21.5월 ~ 8월 : 감리용역 시행

2		공공와이파이 확대설치

①		공공생활권 공공와이파이 확대 설치(3차)

시민 공공생활권에 공공와이파이를 구축하여 고품질의 공공와이파이 서비스 제공 및 정보 접근성을 획기적으로 개선하고 시민의 통신기본권을 전면 보장

□ 추진목표 : (2019) 7,420대 → (2021) 18,450대, 증 11,030대

※ 현행화('20.6.20.) : S-Net 정보전략계획 결과반영(당초 23,750대 → 18,450대, 감 5,300대)

□ 추진방향

○ 사업내용 : 시민 공공생활권역 공공WiFi 설치(실외형 AP)

○ 구축방안 : 기존 CCTV 지지대, 교통 시설물 등 시·구 시설물 공동 활용

○ ***************************************

******************************************************

*******************************************

********************************************

□ 추진계획

구분	계	기존	1차 사업 (2020.9)	2차 사업 (2020.12)	3차 사업 (2021.8)
실외AP(대)	18,450대 (11,030대)	7,420대	9,100대 (1,680대)	15,990대 (6,890대)	18,450대 (2,460대)
사업비(백만원)	44,939		7,029	28,042	9,868

□ 소요예산 : 총 9,868백만원(공사비, 물품구매비 – AP/PoE SW)

○ 실외용 AP장비	: 2,690,000원 × 2,460대  = 6,617,400천원

○ 산업용 PoE SW	:   660,000원 × 2,460대  = 1,623,600천원

○ 설치공사비	:   660,886원 × 2,460개소= 1,625,780천원

*************************************************************************************

□ 향후일정

○ ‘21.1월 ~ 5월	: 사전절차 이행, 사업발주 및 업체선정, BMT

○ ‘21.6월 ~ 8월	: 3차 사업 시행

②		복지시설 공공와이파이 확대 설치 : '21년까지 조기달성

복지시설 및 커뮤니티 공간 등에 공공 와이파이를 설치하여 시설이용자 및 방문자 등에게 통신복지 실현을 위한 통신비 절감과 시민 이용편의 제공

□ 관련근거 : 민선7기 공약 - ‘와이파이 소외없는 서울’ 사업 추진

□ 추진목표 : (2019) 628개소 → (2021) 1,272개소,  증 644개소

□ 추진실적 : *****************************

*************************************************************

□ 추진계획

○ 시설규모, 시설 이용자수, 주요 이용계층 및 와이파이 수요정도 등

- 수요조사(기초자료조사), 현장조사(설계서 작성) 후 종합분석, 우선순위 결정

○ 강남북 지역간 불균형 해소를 위해 지역(자치구)을 안배하여 최종 선정

- 조사된 자료를 기반으로 대상시설수, 설치수량 등 지역간 형평성 고려

○ '21년 조기완료함에 따라 '22년 계획된 복지시설 공공와이파이 예산(1,906백만원)을 공공장소 공공와이파이 예산으로 추가하여 추진

**		*	****	****	****	비고
****	****	*****	***	***	*****
	****		*****	*****	*****
****		*****	*****	***	***
********			***	***	****

□ 소요예산 : 총 1,525백만원

○ 설치공사비      720,000원 × 300개소 =   216,000,000원

○ PoE S/W      660,000원 × 300개소 =   198,000,000원

○ 장비구매비    1,851,300원 × 600대  = 1,110,780,000원

□ 향후일정

○ ‘21.1월 ~ 2월 : 수요조사 및 현장조사 실시

○ ‘21.3월 ~ 4월 : 지원대상시설 최종선정 및 설계도서 작성

○ ‘21.5월 ~ 6월 : 사업발주 및 업체선정

○ ‘21.7월 ~ 8월 : 공공와이파이 구축 및 완료

③		市 직영 공원內 공공와이파이 설치 확대

시민들의 많이 이용하고 휴식공간인 대형공원에 대해 공공와이파이를 설치하여 인터넷에 누구든지 자유롭고 편리하게 이용할수 있는 환경 제공

□ 추진목표 : 24개 공원 AP 537대(’19년 331대, ’20년 84대, ’21년 122대)

구분	계	~2018년	2019년	2020년	2021년
공 원 수	24	6	4	7	7
개 소 수	537	241	90	84	122

□ 추진계획

○ 서울시 직영공원 다중이용공간에 집중․설치하여 이용시민 편의제공

○ 기설치된 CCTV지지대를 최대한 활용하여 설치비용 절감 및 공기단축

○ 설치계획 : 8개 공원, AP 122대                 (단위 : 댓수, 천원)

연번	공원명	AP	소요예산	비고
	8	122	496,540
1	보라매병원	28	113,960
2	간데메공원	4	16,280
3	중랑캠핑숲	18	73,260
4	월드컵공원	16	65,120
5	북서울꿈의숲	22	89,540
6	경춘선숲길	12	48,840
7	서서울호수공원	18	73,260
8	문화비축기지	4	16,280

□ 소요예산 : 총 497백만원

○ 설치공사비 :    720,000원 × 122개소 = 87,840천원

○ PoE S/W :    660,000원 × 122대   = 80,520천원

○ 장비구매비 :  2,690,000원 × 122대   = 328,180천원

□ 향후일정

○ ‘21.1월 ~ 3월	: 공원 공공와이파이 추진계획, 사업발주 및 업체선정

○ ‘21.4월 ~ 6월	: 공원 공공와이파이 구축 및 운영

④		공공와이파이 안정적 운영관리(유지보수 용역)

시민에게 고품질의 공공와이파이 서비스을 제공하기 위하여 장애예방대응 등 안정적인 운영과 장애발생시 신속한 조치 및 복구코자 함.

□ 추진방향

○ 365일 24시간 공공와이파이를 중단없이 사용할 수 있도록 정기·특별점검, 신속한 장애처리 등을 위한 유지보수 및 모니터링 강화

○ 서울시 공공와이파이의 이용실태분석, 품질관리 및 보안강화 등 체계적 운영관리를 위한 공공와이파이 통합관리센터 운영

□ 운영현황 : 33,089대                  (단위 : 대, 2020.12.31.일 기준 - 추정)

구분	고정형 24,828대								이동형 8,981대
	소계	주요거리	전통시장	광장․공원	문화관광	버스정류소	복지시설	공공기관	시내버스	마을버스
‘19.12	13,844	2,350	817	2,157	1,016	167	2,298	5,039	6,000	1,582
‘20.12	10,984	8,570	0	84	0	1,560	770	0	1,399	0
합 계	24,828	10,920	817	2,241	1,016	1,727	3,068	5,039	7,399	1,582

□ 추진계획

○ 사업기간 : 2021.1.1 ~ 12.31(1년)

○ 장비내역 : AP 24,828대, 운영장비 5,841대, 통합관리센터 1식

○ 대상기관 : 서울시(실․국․본부․사업소), 25개 자치구

○ 운영인력 : 12명(고급 1명, 중급 5명, 초급 6명)

○ 주요과업

- 공공와이파이 장애 및 민원 현장 유지보수 인력(2개조 2명 : 4명)

- 공공와이파이 통합관리센터 모니터링, 장애 및 민원 접수․처리(콜센터)

- 공공와이파이 이용실태, 품질관리 분석 및 개선, 보안관리, 이용활성화 방안 등

□ 소요예산 : 총 966,206천원

□ 향후일정

○ ‘20.9월 ~ 12월	: 사업발주 및 업체선정

○ ‘21.1월 ~ 12월	: 용역시행

3		민관 거버넌스 협력강화

①		S-Net 민관거버넌스 운영

스마트서울 네트워크(S-Net) 구축 사업의 성공적인 추진을 위하여 ‘S-Net 자문위원회’등를 구성․운영하여 민관 파트너쉽 및 협력을 강화코자 함

□ S-Net 자문위원회 운영

○ 운영기간 : ‘21.1. ~ 12. - 연 4회 이상

○ 위    원 : *******************************

○ 주요역할 : S-Net 효율적 구축 및 운영 관리방안, 신기술 검토 및 자문

□ S-Net 대시민 토론회(공청회) 개최

○ 운영기간 : ‘21.1. ~ 12. - 연 2회

○ 참    석 : 학계, 기업, 연구원, 관계 공무원 등 200여명

○ 주요역할 :  전문가, 시민단체 등이 참여하는 정책 포럼&토론회

□ S-Net 워크숍 개최

○ 운영기간 : ‘21.1. ~ 12. - 연 2회

○ 참    석 : ***********************************

○ 주요역할 : 우수사례 공유를 통해 비전, 쟁점, 발전방안 토론 및 소통․협력 강화

□ 소요예산 : 총 33백만원

○ 제안서 평가 및 자문수당	: 150,000원×8명×10회	=12,000천원

○ S-Net 실무워크숍	:   7,000,000원×1회	= 7,000천원

○ 민관 거버넌스 운영비	:   2,000,000원×4회	= 8,000천원

○ 기술세미나 및 토론회비	:   3,000,000원×2회	= 6,000천원

□ 향후일정

○ ‘21.1월 ~ 3월	: 자료수집 및 계획수립

○ ‘21.4월 ~ 12월	: 민관 거버넌스 운영

②		스마트서울 네트워크(S-Net) 홍보 강화

시민들과 외국인 관광객이 공공와이파이 설치지역임을 바로 알 수 있도록  스마트서울 네트워크(S-Net) 사업의 적절한 시기에 전략적으로 집중 홍보

□ 추진방향

○ 공공 와이파이 설치 지역을 알려주는 안내 표지(엠블렘) 부착·설치

○ 공공 와이파이 주요 이용 시민에게 친숙한 뉴미디어 활용 바이럴 전개

□ 추진실적 : 공공와이파이 브랜드 및 네이밍 선정

□ 추진계획

○ 공공 와이파이 안내 표지판 및 스티커 제작․부착 – 기존 실외 AP 대상

○ GPS기반으로 공공 와이파이 위치를 확인할 수 있는 모바일 지도 제작

○ 시민소통․뉴미디어 파트너와 협업, 市 온라인매체 활용 콘텐츠 확산

□ 소요예산 : 총 167,200천원

○ 공공와이파이 표지판 인쇄․부착(1만원 × 기존 AP 7,420대)	: 74,200천원

○ 공공 와이파이 이용안내 이미지 및 모바일 지도 제작	: 10,000천원

○ 시민 모니터링단 연계 만족도 조사 및 캠페인 추진	: 33,000천원

○ S-Net 운영·관리 매뉴얼 및 백서 등 홍보자료 제작     : 50,000천원

□ 향후일정

○ ‘21.1월 ~ 2월	: 계획 수립 및 콘텐츠 기획

○ ‘21.3월 ~ 4월	: 공공와이파이 안내 표지판, 이미지 및 지도 제작

○ ‘21.5월	: 공공와이파이 안내 표지판 설치 및 이용 홍보 추진

Ⅴ		소요예산 : 총 32,106백만원

□ 사업별 예산내역 : 32,106백만원                    (단위 : 원)

구분			단위	물량	단가	합계
계						32,106,271,000
유무선 통신 인프라 구축		소계				18,001,645,000
		광통신망	㎞	546	32,695,320	17,851,645,000
		공사감리비	구	5	30,000,000	150,000,000
공공와이파이	공공 생활권	소계				9,866,780,000
		설치공사비	개소	2,460	660,886	1,625,780,000
		산업용 PoE SW	대	2,460	660,000	1,623,600,000
		실외 AP	대	2,460	2,690,000	6,617,400,000
	서울시 직영공원	소계				496,540,000
		설치공사비	개소	122	720,000	87,840,000
		산업용 PoE SW	대	122	660,000	80,520,000
		실외 AP	대	122	2,690,000	328,180,000
	복지시설	소계				1,524,780,000
		설치공사비	개소	300	720,000	216,000,000
		산업용 PoE SW	대	300	660,000	198,000,000
		실외 AP	대	600	1,851,300	1,110,780,000
운영관리비	공공와이파이 유지보수		식	1		966,206,000
	공공와이파이 통신사용료		회선	2,070		1,005,120,000
	S-Net 구축운영비		식	1	21,000,000	21,000,000
	S-Net 사업홍보		식	1	167,200,000	167,200,000
	공공와이파이 전수조사 용역		식	1	35,000,000	35,000,000
	기타(소모품, 자문수당)		식	1	22,000,000	22,000,000

□ 예산과목별 : 32,106백만원                      (단위 : 원)

구분		단위	물량	단가	합계
계					32,106,271,000
사무관리비	소계				245,200,000
	소모품 및 자문수당	식	1	22,000,000	22,000,000
	S-Net 구축운영비	식	1	21,000,000	21,000,000
	S-Net 사업홍보비	식	1	167,200,000	167,200,000
	공공와이파이 전수조사 용역	식	1	35,000,000	35,000,000
공공운영비	소계				1,971,326,000
	와이파이 유지보수	식	1	966,206,000	966,206,000
	와이파이 통신료	회선	2,070		1,005,120,000
시 설 비	소계				19,781,265,000
	광통신망 구축공사	㎞	546	32,695,320	17,851,645,000
	공공생활권 공공와이파이	개소	2,460	660,886	1,625,780,000
	시직영공원 공공와이파이	개소	122	720,000	87,840,000
	복지시설 공공와이파이	개소	300	720,000	216,000,000
감 리 비	S-Net 공사감리비	구	5	30,000,000	150,000,000
자산취득비	소계				9,958,480,000
	공공생활권 실외 AP	대	2,460	2,690,000	6,617,400,000
	공공생활권 PoE SW	개소	2,460	660,000	1,623,600,000
	시 직영공원 실외 AP	대	122	2,690,000	328,180,000
	시 직영공원 PoE SW	개소	122	660,000	80,520,000
	복지시설 실내 AP	대	300	1,851,300	1,110,780,000
	복지시설 PoE SW	개소	300	660,000	198,000,000

□ 연차별 투자계획(구축비)                        (단위 : 백만원)

구분		계	2020년	2020년 추경	2021년
총 계		95,176	16,880	49,050	29,246
유무선 통신인프라 구축		46,738	7,877	21,008	17,853
공공 와이파이 확대 조성		48,438	9,003	28,042	11,393
	공공생활권 공공와이파이	44,939	7,029	28,042	9,868
	복지시설 공공와이파이	3,499	1,974	-	1,525

*******************************************************************************************************************

**********************************************************************

Ⅶ		행정사항

□ 스마트서울 네트워크(S-Net) 구축 예산반영	: 예산담당관

□ 스마트서울 네트워크(S-Net) 전담조직 신설	: 조직담당관

○ 조직신설 : 1추진반 4팀 (신설 1팀, 이관 3팀)

○ 인력충원 : 총23명      (증원 4명, 국내 조정 17명, 실국 조정 2명)

□ 실․국 간 업무조정 : 푸른도시국, 도시교통실, 스마트도시정책관

○ 대상기관 : 푸른도시국/ 도시교통실 → 스마트도시정책관 이관(업무 및 인력)

○ 조정업무 : 마을․시내버스 공공와이파이 설치 및 운영관리(버스정책과), 공원 공공와이파이․지능형CCTV 설치 및 운영관리(공원녹지정책과)

□ 스마트서울 네트워크(S-Net) 구축․운영 전담조직 및 인력확보 : 25 자치구

○ 대상인력 : 방송통신 4명, 행정․전산 1명

○ 추진사업 : 자가 광통신망․공공와이파이․사물인터넷망 구축 및 관리운영

붙임 **********

**********************

**************************

****************************