투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	설계변경 계약 의뢰[동북권 아동청소년 예술교육센터 건립 전기공사(1차)]

우리 본부에서 추진중인 □동북권 아동청소년 예술교육센터 건립 전기공사□ 아래와 같이 변경계약 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 동북권 아동청소년 예술교육센터 건립 전기공사

2. 계약업체 : ****************

3. 변경계약 내용

가. 도급비 변경내용

구분	공사기간 및 도급비 변경내용
	당 초	변 경	비고
총차	**********************	*	****
1차	***********************	************************	******
도급비	****************** *******************	*	****

4. 변경사유 : 선행공종(건축공사) 준공기한 연기에따른 1차수 전기공사 공기연장 및 내역변경

5. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙  임 :  1. 건설사업관리단 공문 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 방침서 1부.  끝.

	설 비 부 장
주무관	이정훈		건축설비과장	배수웅		설비부장	04/28
김호성
협조자
시행	설비부-22169	(	2022.04.28	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동 96번지) 프리미어플레이스 빌딩 15층	/	http://seoul.go.kr
전화	02-3708-8628	/전송	02-3708-8659	/	ljh0447@seoul.go.kr	/	부분공개(5)