문서번호	건축부-22151
결재일자	2022. 4. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		복지시설과장	건축부장
이제관		이문희	04/28
			신명승
협조

『AI지원센터건립공사 건설사업관리용역』

물가변동(1회)에 의한 계약금액 조정 검토 보고

2022. 4.

도시기반시설본부

(건 축 부)

『AI지원센터건립공사 건설사업관리용역』

물가변동(1회)에 의한 계약금액 조정 검토 보고

『 AI지원센터건립공사 건설사업관리용역』관련 물가변동 계약금액 조정 요청서가 제출되어 검토 결과를 보고 드림

Ⅰ		용역개요

용 역 명 : AI지원센터 건립공사 건설사업관리 용역

용역내용 : 건설기술진흥법에 따른 건설사업관리 (감독권한대행)

- 건축,안전,토목,조경,기계,전기,정보통신,소방,폐기물, 관급자재 등 전 분야

용역기간 :′21.05.10.~′23.05.09. (2차:′21.05.10.~′22.11.30.)

용역금액 :  ********************************

용 역 사 : (주)종합건축사사무소 근정 외 2개사

Ⅱ		계약금액 조정 사유 및 근거

조정 사유 : 물가변동으로 인한 계약금액 조정

관련 근거

- 지방계약법 제22조, 같은 법 시행령 제73조 및 같은 법 시행규칙 제72조

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정안전부 예규 제21호, ‘18.1.10.) 제14장 용역     계약 일반조건 제6절 제2호 물가변동으로 인한 계약금액 조정

- 『국토교통부 고시 제2021-961호(‘21.07.14.)』에 의한 건설엔지니어링 대가     등에 관한 기준  제7조(대가의 조정)

-「물가변동에 따른 계약금액 조정보고서 제출」근정제2022-310호(‘22. 3. 24.)

Ⅲ		계약금액 조정 요건 검토

조정 요건 : 기간요건, 변동요건 및 절차상 요건이 모두 충족되어야 함.

- 기간요건 : 계약체결일로부터 90일 경과

- 변동요건 : 입찰일을 기준으로 품목조정률이 100분 3(3.0%) 이상 증감

- 절차요건 : 계약상대자의 조정 청구

입  찰  일 : 2021.04.16

계약체결일 : 2021.04.30

직전기준일(기준시점) : 2021.04.16.

조정기준일(비교시점) : 2022.01.01

검토결과

***************************************

*********************************************

**********************************************

******************************************************

계약금액 조정 내역

- 계약금액 조정보고서 작성 : **********

구 분	금 액	비 고
계약금액(총차)(A)	**************	*
적용제외대가(B) (조정기준일 이전 배치분, 기성청구금)	************	***************************
적용대가(C=A-B)	*************
품목조정율	*****
조정금액(D)=(C×3.99%)	************	*******
변경후 계약금액(총차) (F)=(A+D+E)	*************	************

Ⅳ		처리의견

○ 물가변동으로 인한 계약금액조정 신청사항에 대하여 지방계약법령 및 계약조건 등을 검토한 바, 적정하므로 총차 및 2차 계약금액을 아래와 같이 조정하고자 함.

(단위 : 원)

구분		변경전	변경후	증․감
총차	용역기간	********************	********************	*****
	금액(원)	*************	*************	*************
1차	용역기간	********************	********************	*****
	금액(원)	***********	***********
2차	용역기간	********************	********************	******
	금액(원)	************	***********	*************
3차 (예정)	용역기간	********************	********************	*****
	금액(원)	***********	***********	*************

붙임 : 계약금액 조정 보고서 제출공문 및 보고서 1부.  끝.