“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	동부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	공사변경계약 체결 통보[용마배수지(4지) 내부방식공사]

1. 시설관리과-22853(2022.04.27.)호와 관련입니다.

2. 귀 부서에서 의뢰한 변경계약건에 대하여 다음과 같이 계약 체결하였음을 알려 드리니 업무에      참고하시기 바랍니다.

가. 변경내역

- 변경사유 : 코로나19에 따른 작업중지 및 추가 작업 소요일수로 인한 변경

계 약 명	총차 공사금액(원)	공사기한		비고
		변경전	변경후
용마배수지(4지) 내부방식공사	1,881,076,530	2021.7.20. ~ 2022.4.30.	2021.7.20. ~ 2022.5.20.	준공기한 변경

나. 계약상대자 : 주식회사 국성 김현국

다. 변경계약일 : 2022.04.29.

붙임  1. 공사변경계약서 1부.  끝.

	행 정 지 원 과 장
주무관	최슬기		행정관리팀장	김태희		행정지원과장	04/29
代김태희
협조자
시행	행정지원과-22605	(	2022.04.29	)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13, 동부수도사업소 1층 행정지원과 (행당동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2612	/전송	02-3146-2678	/	seul0219@seoul.go.kr	/	부분공개(7)