투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	준공기한 연기요청[별내선(8호선연장) 1-2구간 정보통신공사(1차)]

별내선(8호선연장) 1-2구간 정보통신공사(총차, 1차) 공사에 대하여 아래와 같이 준공기한을 연기하고자 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 계 약 명: 별내선(8호선연장) 1-2구간 정보통신공사(총차, 1차)

2. 계약현황

구분	계 약 명	계약번호 (관리번호)	계 약 기 간	계 약 자
총차	별내선(8호선연장) 1-2구간 정보통신공사	21120154 (2*******00)	2021. 05. 21. ~ 2024. 01. 28.	㈜디지팍스
1차		공사관리번호 (2*******00)	2021. 05. 21. ~ 2022. 05.20

3. 준공기한 연기

구분	준공기한연기		비고
	당초	변경
별내선(8호선연장) 1-2구간 정보통신공사(1차)	2021.05.21. ~ 2022.05.20	2021.05.21. ~ 2022.11.30	증 194일

※ 총차수 계약기한 및 계약금액 변경없음

○ 변경사유: 선행공정(토목 등) 지연으로 기한연장

○ 귀책사유: 경기도, 서울특별시 도시기반시설본부

○지체상금 부과여부: 미부과

붙임  1. 별내선(8호선연장) 1-2구간 정보통신공사(총차,1차) 준공기한 연기 검토 보고 1부.

2. 별내선(8호선연장) 1-2구간정보통신공사(1차) 공사기한 연기 승인 요청(감리단) 1부.

3. 공사기한 연기원 및 사유서(별내선 1-2구간 정보통신공사) 1부.

4. 준공기한 연기의뢰서(별내선 1-2구간 정보통신공사) 1부.  끝.

	도시철도설비부장
주무관	김태연		정보통신과장	김이곤		도시철도설비부장	05/02
김중영
협조자
시행	도시철도설비부-21417	(	2022.05.02	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스 빌딩 8층 도시철도설비부 정보통신과	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7320	/전송	02-772-7308	/	seoultt@seouol.go.kr	/	부분공개(5)