문서번호	급수운영과-22221
결재일자	2022. 5. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
정원훈	代장형준	05/03
		代이승우

「수서역세권 공공주택지구」

상수관로 분기공사 공법변경에 따른 검토보고

2022. 5.

강남수도사업소

(급수운영과)

「수서역세권 공공주택지구」

상수관로 분기공사 공법변경에 따른 검토보고

한국토지주택공사(LH)에서 시행하는 수서역세권 공공주택지구 내 상수관로 신설공사(원인자 공사) 중 분기공사 공법변경[개착식→비개착식(GIP 강관추진공법)]에 따른 검토요청이 접수되어 아래와 같이 보고드림

□ 관련문서

○ 한국토지주택공사 서울위례단지사업 1부-1308(2022.04.27.)호

□ 공사현황

○ 사 업 명: 수서역세권 공공주택지구 조성공사

○ 사업기간: 2016. 6. 29. ~ 2023. 12.31.(전체 공정률 72%)

○ 시행부서: 한국토지주택공사[시공사: 청솔건설(주)]

○ 위    치: 수서동 187번지 일원(사업면적: 386,479㎡)

○ 지구 내 상수도 공급계획

- 본부 배수과 기 협의완료[배수과-6356(18.8.10.)호]

□ 주요 진행사항

○ '18.08.01. ~ '18.08.31.: 본부(배수과, 계획설계과) 및 강남수도사업소(급수운영과) 수서역세권 공공주택지구 수도공급계획 관련 검토 회신

○ '21.11.09. : 수서역세권 공공주택지구 상수도공사 착수 알림(LH→사업소)

당 초	변 경
**********************************************	*********************************************** ****************

○ '22.04.27. : 수서역세권 공공주택지구 상수관로 추진 및 분기공사 시공상세도 제출

□ 검토내용

○ 착공계 변경내용

□ 검토결과

○ 한국토지주택공사로부터 분기(D1000/400mm)방법 변경에 따른 검토요청과 관련하여 밤고개로 상에 매설된 시설물(통신, 전기, 가스 등)이 많아 개착식공사 시 차량통행 불편 및 안전사고 등이 발생할 가능성있고 ※ 개착공사 시 6차선(B=6m, L=28.9m) 도로점용 필요

○ 사전 도로점용 관련하여 한국토지주택공사와 강남구청 교통행정과의 교통소통대책 협의결과 교통여건상 2차선 이상 점유가 불가하며, 시민들의 안전 및 통행볼편 등의 사유로 비개착식 공법(GIP강관추진공법)으로 기 협의완료된 사항으로 분기공사 공법 변경[개착식 → 비개착식(GIP강관추진공법)]하여 시공하는것이 타당하다고 판단됨

※ 「수서역 역세권 공공주택지구 상수도공사」에 따른 공사중 교통소통대책 승인 통보[강남구청 교통행정과-4509(21.3.14.)호]

□ 조치계획

○ 상기 검토내용과 같이 한국토지주택공사에 상수관로 분기공사 공법변경 승인통보하고자 하며 분기공사 및 실 착공 전 현장입회 코자 합니다

붙임   1. 수서역세권 공공주택지구 상수관로 추친 및 분기공사 시공상세도 제출 1부.

2. 시공계획서(상수관로 추진 및 분기공사) 검토 보고 1부.

3. 공사위치도 1부.  끝.