문서번호	급수운영과-22214
결재일자	2022. 5. 3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
이재헌		이승우	05/03
			代이승우
협조
	주무관		차승현

『2021년 신사동 외 6개동 상수도공사』

설계변경(4차-최종) 및 정산 보고

2022. 05.

강남수도사업소

(급수운영과)

『2021년 신사동 외 6개동 상수도공사』

설계변경(4차-최종) 및 정산 보고

우리 사업소에서 시행중인 『2021년 신사동 외 6개동 상수도공사(장기계속단가계약)』의 계약금액 증액 분에 대해, 본부심사 결과를 반영하여 설계변경 및 정산을 시행코자 아래와 같이 보고드림

☐ 개    요

ㅇ 공 사 명: 2021년 신사동 외 6개동 상수도공사(장기계속단가계약)

ㅇ 공사기간: ************************

ㅇ 공사개요: ****************

ㅇ 도 급 비: ***********************************

ㅇ 도 급 자: *************

ㅇ 추진경위

- 2022.4.20.: 설계변경 심사요청(사업소 → 본부)

- 2022.4.28.: 계약금액 조정결과 통보(본부 → 사업소)

☐ 설계변경 사항 및 심사결과

ㅇ 설계변경 사항

- 사    유: 시공물량 증⋅감 및 신규공종 발생에 따른 설계변경

*********************************************************************************************************************************************************************************************

※ 제비율 항목의 경우, 계약금액조정검증시스템을 통해 산정된 조정금액 적용

ㅇ 심사결과(본부 안전조사과)

- 심사결과: *********

- 내    역: 토공수량 조정[기계다짐(양호), 환토소운반, 환토상차]

☐ 조치계획

ㅇ 심사결과를 반영하여 설계변경을 실시하고 준공 정산코자 함

**************************************************************************************************************************************************************************************************************

붙임: 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 설계변경 관련 본부 심사 자료 각 1부.

3. 계약검증 확인서 1부.  끝.