실정보고 검토서

공사명

신상도 지하차도 확장공사

공사개요

·위치: 동작구 상도동 159-21~207-5

·규모: 도로 확장 2→4~6차로, L=324m

(지하차도 확장 2→4차로, L=221m)

·공사기간: '07.12.31.~'22.5.26.

·도 급 비: 19,792,960천원

·시공사: ㈜한백종합건설            외 1개사

·감리단: 극동엔지니어링㈜            외 2개사

·설계사: ㈜유신

실정보고 건명

안전관리용 웹카메라(CCTV) 설치·운용(신상도감2022-545호, '22.5.2.)

실정보고

사유

실시간 현장상황 모니터링을 통한 안전관리, 작업 진행사항 확인 등을 위하여 웹카메라를 설치 및 운영하고 비용을 반영하고자 함.

건설사업관리단

검토의견

「건설기술진흥법 시행규칙」 제60조제1항제5호, 「건설기술 안전관리업무 수행지침」별표7 등 관련규정에 따라 안전관리비로 반영함이 적정하며, 신규비목 단가는 최소 금액 견적서를 기준으로 적정하게 산출한 것으로 판단됨.

변경(안)

구 분	당 초	변 경	증·감
수 량	-	웹카메라 설치·운용 1식	증) 웹카메라 설치·운용 1식
도급비	-	4,114천원	증) 4,114천원

예산조치계획

당초 사업비 범위 내 시행 가능

추가 행정절차 이행 필요여부

해당 없음

발주처

검토의견

책임건설사업관리기술자의 검토의견이 타당한 것으로 판단되므로 실정보고 승인 통보하고 추후 설계변경 반영하고자 함.

결재

주무관

이시연

방재시설과장

최진우

방재시설부장

05/03

이동훈