실정보고 검토서

공사명

신상도 지하차도 확장공사

공사개요

·위치: 동작구 상도동 159-21~207-5

·규모: 도로 확장 2→4~6차로, L=324m

(지하차도 확장 2→4차로, L=221m)

·공사기간: '07.12.31.~'22.5.26.

·도 급 비: 19,792,960천원

·시공사: ㈜한백종합건설            외 1개사

·감리단: 극동엔지니어링㈜            외 2개사

·설계사: ㈜유신

실정보고 건명

교통소통대책에 의한 변경(노면표시, 가각부 보도채움) 및 충격흡수시설 변경(신상도감2022-542호, 2022.4.29.)

실정보고

사유

·서울경찰청 교통규제 심의결과에 따라 단계별 교통처리계획에   맞게 노면표시를 실시하고 신상도초교 사거리의 가각부는 보도   채움을 통해 교통환경을 개선하고자 함.

·당초 충격흡수시설로 설계된 쏠라PCS2타입은 국내에서 차량충돌시험을 미실시하여 성적서 제출이 불가함에 따라 지하차도 통행 차량의 안전 확보를 위하여 충돌시험결과를 확인한 CC1급으로 변경 설치하고자 함.

건설사업관리단

검토의견

신규비목 단가는 최소 금액 견적가 및 건설품셈을 기준으로 적정하게 산출한 것으로 판단됨.

변경(안)

구 분	당 초	변 경	증·감
수 량	< 붙임문서 참조 >
도급비	6,820천원	122,100천원	증) 115,280천원

예산조치계획

당초 사업비 범위 내 시행 가능

추가 행정절차 이행 필요여부

해당 없음

발주처

검토의견

책임건설사업관리기술자의 검토의견이 타당한 것으로 판단되므로 실정보고 승인 통보하고 추후 설계변경 반영하고자 함.

결재

주무관

이시연

방재시설과장

최진우

방재시설부장

05/03

이동훈