문서번호	토목부-22721
결재일자	2022. 5. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
이승주		代박웅교	05/03
			代김태중
협조

설계변경(전체5회, 5차1회) 검토 보고

[신림공영차고지(저류조포함) 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역]

2022. 5.

도시기반시설본부

(토    목    부)

설계변경(전체5회, 5차1회) 검토 보고

[신림공영차고지(저류조포함) 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역]

「신림공영차고지(저류조포함) 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역」의 물가변동(3회) 반영 및 건설사업관리술자 배치 계획 변경에 따른 설계변경 검토 보고임

1		관 련 근 거

○ 건설사업관리 설계변경(전체5회,5차1회) 제출[제일(발)2022-1377(2022.04.20.)호]

○ 물가변동(E/S)에 의한 계약금액 조정(3회) 검토보고[토목부-20370(2022.03.28.)호]

2		용 역 개 요

○ 용역명 : 신림공영차고지(저류조포함) 건설공사 감독권한대행등 건설사업관리용역

○ 기  간 : '18.4.2. ~ '23.12.31.(5차 : '22.1.1. ~ '22.12.31.)

○ 규  모 : 주차장 및 빗물저류조 조성(버스 101대, 빗물저류조 V=35,000m3)

○ 도급비 : 3,661,800천원(5차 : 916,500천원)

○ 용역사 : ㈜제일엔지니어링종합건축사사무소 외 2개사

3		보 고 내 용

○ 설계변경 내용                                                 (단위 : 천원)

**		****	***	***
** **	***	*********	*********	*********
	*****	*********************	*********************	****
** **	***	*******	*******	****
	*****	*********************	*********************	****

○ 설계변경 사유

- 건설사업관리 물가변동으로 인한 계약금액 조정(3회, 3.13%) 승인사항 반영

- 강제집행 지연으로 인한 건설사업관리기술자 배치계획 조정

4		조 치 의 견

○ 물가변동으로 인한 계약금액 조정 승인사항 및 강제집행(화원) 지연으로 인한 건설사업기술인 배치 계획 변경을 반영한 건설사업관리용역 설계변경 검토결과가 적정하므로 설계변경 시행코자 함.

붙임  1. 건설사업관리 설계변경 제출 공문(검토보고서) 1부.

2. 설계변경 내역서(전체5회 및 5차1회) 각 1부.  끝.