문서번호	도시철도설비부-21542
결재일자	2022. 5. 4.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	정보통신과장	도시철도설비부장
유홍근	김이곤	05/04
		김중영

별내선[8호선연장] 1-1구간 정보통신공사[1차] 설계[내역]변경 검토보고

2022. 05

도시철도설비부

(정보통신과)

『별내선[8호선연장] 1-1구간 정보통신공사[1차]』

설계[내역] 변경 검토보고

『도시철도 별내선(8호선연장) 1-1구간 정보통신공사[1차]』선행공정 지연 등 현장여건 변경에 따른 설계(내역) 변경사항 검토 보고임.

관련근거

○ 별내선(8호선연장)1-1구간 정보통신공사 계약내역 변경 검토보고(별내선시감 제22-331/‘22.04.29)

공사개요

○ 공사명 : 별내선(8호선연장)1-1구간 정보통신공사

공사규모	본선 4.615km, 1개역(BN1) 신설
계약기간	***************************** ****************************
계약금액	********************** *********************
계약업체	한진영상정보(주) (대표자 김상균)
감리단	문엔지니어링(주)

1차공사 내역변경

○ 설계(내역) 변경

- 선행공정 부진 등 현장여건을 반영, 계약금액 및 준공기한 변동없이 공사기한 내 완료 가능한 공종으로 내역 변경

- 내역변경 사유 : 선행공정(토목) 지연 등 현장여건 반영

·토목 1공구 0k ~ 0k300m 차수벽 공사 지연으로 작업일정 조정

·토목 2공구 2k175m ~ 3k478m 하저터널 횡갱공사로 하저터널 내 작업불가

·토목 2공구 3k478m ~ 3k718m 터널 바닥공사 시공 중

·토목 3공구 3k800m ~ 4k100m 누수에 따른 터널 보수로 작업불가

-  계약기간 및 계약금액 변경

구 분	당 초		변 경
	총차	1차	총차	1차
계약금액	**************	**************	변경없음	변경없음
준공기한	***********	***********	변경없음	변경없음

○ 내역변경 주요내용

- 본선터널 구간 중 선행공정 부진 및 현장여건으로 시공이 불가능한 본선케이블트레이(3,592m) 및 암사역 강제전선관(219m)등의 설치 공종을 2차 공사로 차수 조정

- 선행공정이 빨라 시공이 가능한 본선터널 복합통신케이블(1,233m) 및 BN1 정거장 강제전선관(2,286m) 등 2차공사 추진예정 공종을 1차 공사로 내역 변경

주요 공종 및 수량 변경내용

구분	공 종	품 명(규격)	단위	당 초	변 경	증/감	비 고
1.본선	1.1 본선광케이블 (교통공사~암사역)	강제전선관(28,36mm)	m	***	*	****	현장여건에 따라 강제전선관을 플렉시블관으로 변경 (설계변경 대상으로 2차로 조정)
		C형찬넬	조	**	*	***
		파이프크램프	개	***	*	****
	1.2 본선케이블	CABLE TRAY (W200 X H100)	m	******	*****	******	- 케이블트레이 :선행공정 지연 등 현장여건에 따라 미시공분 2차로 조정 복합통신 : 공사 가능한 본선구간, 1차로 변경시행
		트로프(TW 220)	m	***	*	****
	1.4 복합통신설비	방사형동축케이블(33D)	m	*	*****	*****
		케이블클램프	개	*****	*****	******
2.BN1정거장	2.1전자교환 및 LAN설비	강제전선관 (16~28mm)	m	*	***	***	BN1정거장 건축 등 선행공정 조기 진행에 따라 통신배관 공정 1차로 변경
		C형찬넬(41*25*1.2t)	조	*	***	***
		CABLE DUCT	m	*	**	**
	2.1.2화상전송설비	강제전선관(16~42mm)	m	*	*****	*****
		C형찬넬(41*25*1.2t)	m	*	***	***
	2.1.6자동방송설비	강제전선관(16~36mm)	m	*	***	***
		C형찬넬(41*25*1.2t)	m	*	***	***
		아울렛박스(중형사각)	개	*	**	**

○ 공사비 증감내역

(단위 : 원)

구 분	1차 계약(변경)			비 고
	당 초	변 경	증 감
재 료 비	**********	**********	**********
노 무 비	***********	***********	***********
경 비	*********	*	**********	근무관리시스템
직접비 계	***********	***********	*********
간 접 비	***********	***********	***********	보험료,일반관리,이윤 감
가설공사비	*	**********	**********
도 급 비	*************	*************	*	증감 없음

책임감리 검토의견

○「별내선(8호선연장)1-1구간 정보통신공사」추진 중 현장여건에 맞게 1차분 시공수량(계약내역)을 조정, 효율적인 공정관리와 정보통신공사 추진에 만전을 기하고자 계약내역을 변경함이 타당하다고 판단됨.

검토의견 및 조치계획

○ 검토의견 : 상기와 같이 검토된 내용대로 설계(내역)변경하여 원활한 공정관리와 관련 업무추진에 만전을 기하고자 함

○ 계약부서(총무부)에 1차공사 변경계약 시행

붙임 : 별내선(8호선연장)1-1구간 정보통신공사 계약내역 변경 검토보고 문서 1부. 끝.