문서번호	물순환정책과-22584
결재일자	2022. 5. 4.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
주무관	물순환시설팀장	물순환정책과장	물순환안전국장
박경리	이재학	김재겸	05/04
			한유석

「CSOs 저류조(2개소) 설치 기본계획수립 용역」

준공기한 연기 검토 보고

2022. 5.

물순환안전국

(물순환정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	□

「CSOs 저류조(2개소) 설치 기본계획수립 용역」

준공기한 연기 검토 보고

「CSOs 저류조(2개소) 설치 기본계획수립 용역」추진 중 준공기한 연기요청 사유가 발생되어 검토하고 그 결과 보고 드림.

□ 용역 개요

ㅇ 용 역 명 : CSOs 저류조(2개소) 설치 기본계획 수립

ㅇ 용역기간 : ’21.3.30. ∼ ’22.5.31.

ㅇ 계약금액 : 339,220천원

ㅇ 용 역 사 : ㈜범한엔지니어링 종합건축사사무소, ㈜삼우씨엠건축사사무소, ㈜삼우전기컨설턴트

ㅇ 과업내용

– 뚝섬, 대치유수지 CSOs 저류조 설치계획 수립

· 대상지역의 처리유량, 오염부하량 조사

· 사업 타당성 및 경제성 분석·결과 제시

· 소요사업비 및 사업기간 산정, 연차별 투자계획 수립

– 유수지 내 CSOs 저류조 설치계획, CSOs 저류·처리방안 제시 등

□ 추진 경과

ㅇ ’20.10.14. : CSOs 저류조(2개소) 설치 기본계획 수립 용역 방침 수립

ㅇ ’21. 3.30. : 용역 계약 및 착수

ㅇ ’21. 6. 1. : 용역 착수보고 및 외부전문가 자문

ㅇ ’21.12.15. : 용역계약 변경(준공기한 연기)

※ 변경내용 : ************************************************

****************************

ㅇ ’22. 1.28. : 용역 중간보고 및 외부전문가 자문

□ 준공기한 연기

ㅇ 변경사항

구 분	당초	변경	비고
계약기간	’21.3.30. ∼ ’22.5.31.	’21.3.30. ∼ ’22.12.31.

****************

*****************

******

– ******************************************************************************************************************************************************************

▶ 현재 차집관로 복선화사업 부설 용량 및 부설노선 미확정

********************************************************

–**************************************

⇒***************************************************************

□ 향후 계획

ㅇ 준공기한 연기에 따른 계약변경 의뢰(재무과)

붙임  1. 과업기간 연기요청 공문 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.