실정보고 검토서

공사명

신상도 지하차도 확장공사

공사개요

·위치: 동작구 상도동 159-21~207-5

·규모: 도로 확장 2→4~6차로, L=324m

(지하차도 확장 2→4차로, L=221m)

·공사기간: '07.12.31.~'22.5.26.

·도 급 비: 19,792,960천원

·시공사: ㈜한백종합건설            외 1개사

·감리단: 극동엔지니어링㈜            외 2개사

·설계사: ㈜유신

실정보고 건명

교통안전시설 설계 및 감리비(신상도감2022-547호, 2022.5.4.)

실정보고

사유

서울경찰청 교통안전시설 심의결과에 따라 교통안전시설(교통신호기, 안전표지)을 설치하기 위하여 자격요건에 맞는 업체를 선정하고 설계 및 감리비를 반영하고자 함.

건설사업관리단

검토의견

교통안전시설 설계 및 감리비는 엔지니어링사업대가 및 전력기술관리법 운영요령에 따라 공사비요율방식으로 산출한 금액과 견적가를비교하여 최소금액을 적용함으로써 적정하게 산출한 것으로 판단됨.

변경(안)

구 분	당 초	변 경	증·감
수 량	-	교통안전시설 설계 및 감리비 1식	증) 교통안전시설 설계 및 감리비 1식
도급비	-	31,394,000원	증) 31,394,000원

예산조치계획

당초 사업비 범위 내 시행 가능

추가 행정절차 이행 필요여부

해당 없음

발주처

검토의견

책임건설사업관리기술자의 검토의견이 타당한 것으로 판단되므로 실정보고 승인 통보하고 추후 설계변경 반영하고자 함.

결재

주무관

이시연

방재시설과장

代김소연

방재시설부장

05/06

이동훈