문서번호	토목부-22835
결재일자	2022. 5. 6.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
이회진		황윤기	05/06
			하현석
협조

- 창동 상계 동서간 연결교량(보행교, 보차도교) 건설공사 -

실정보고(공사기한 연장)검토 보고

2022. 05

도시기반시설본부

(토  목  부)

- 창동 상계 동서간 연결교량(보행교, 보차도교) 건설공사 -

실정보고(공사기한 연장)검토 보고

창동 상계 동서간 연결교량(보행교 및 보차도교) 공사기한 연장 실정보고 검토결과를 보고 드림

◆ 준공기한 연기 - 수방기간 154일 포함

·보 행 교(1차) : 당초 '22.5.16. ⇒ 변경 '22.12.02 (연장 202일)

·보차도교(1차) : 당초 '22.5.16. ⇒ 변경 '22.11.22 (연장 192일)

1		근 거

○ 보행교 실정보고 검토보고(1차공사 공사기간 연장의 건) - 창동상계 제22-099호('22.05.05.)

○ 보차도교 실정보고 검토보고(1차공사 공사기간 연장의 건) - 창동상계 제22-098호('22.05.05.)

2		공 사 개 요

□ 보 행 교

○ 사 업 명 :  창동 상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사

○ 규    모 :  보행교 건설(연장 110.5m, 폭 10.0~15.0m)

○ 사업기간 :  '21.04.19. ∼ '24.04.18. (1차 '21.04.19. ∼ '22.05.16.)

○ 도 급 비 :  ************************

○ 시공사/건설사업단 : *****************************

○ 공 정 률 : 20.11%('22.05.06 현재)

□ 보차도교

○ 사 업 명 : 창동 상계 동서간 연결교량 보차도교 건설공사

○ 규    모 : 보차도교 건설(연장 118.0m, 폭 32.0m)

○ 사업기간 : '21.04.19. ∼ '24.04.18. (1차 '21.04.19. ∼ '22.05.16.)

○ 도 급 비 : *************************

○ 시공사/건설사업단 : *******************************

○ 공 정 률 : 29.85%('22.05.06 현재)

3		추 진 경 위

□ 보 행 교

○ 2021. 04. 19. : 공사착공.

○ 2021. 10. : 동부간선도로 지하차도 건설공사 진입로 개설 등에 따른 업무협의(청광, SK)

※ 2022년 07월 의정부 방향 공사 착공 계획 ⇒ 성수방향 차로패쇄

○ 2021. 11. : 동부간선도로 지하차도 건설공사계획 변경, 의정부 방향 공사 착공 ⇒ 성수방향 차량통행

※ 종점부 교대작업과 공사구간 중첩(가시설 작업을 위한 작업공간부족)

○ 2021. 11. 12. : 하천점용허가

○ 2021. 11. 16. : 보행교 임시우회도로 개설공사 시작

○ 2022. 01. 05. : 동부간선도로 지하차도 건설공사 교통 우회 현안보고(시공사 → 감리단,도기본)

※ 22.01 교통우회 및 공사일정 1차협의(Sk,청광,감리단) ⇒ 2월 20일까지 작업 완료 협의

※ 22.02 교통우회 및 공사일정 2차협의(Sk,청광,감리단) ⇒ 3월 07일까지 작업 완료 협의

※ 22.02 교통우회 및 공사일정 3차협의(Sk,청광,감리단) ⇒ 3월 14일까지 작업 완료 협의

○ 2022. 01. 25. : 보행교 임시우회도로 개설 및 지장물 이설 완료

○ 2022. 03. 15. : Sk건설 작업 완료 및 보행교 A2(종점부)작업 착수

□ 보차도교

○ 2021. 04. 19. : 공사착공.

○ 2021. 09.     : 공사중 산책로 및 자전거도로 처리계획 업무 협의(도봉구청,노원구청)

○ 2021. 09. 29. : 인허가 협조 요청(서울시 → 도봉, 노원구청)

○ 2021. 10. 15. : 협의결과에 의한 우회도로 계획안 제출(시공사 → 도봉, 노원구청)

○ 2021. 10. 19. : 시설물 관리부서 협의안 접수(도봉,노원구청→시공사)

○ 2021. 11. 12. : 하천점용허가

○ 2021. 11. 15. : 보차도교 임시우회도로 개설공사 시작

○ 2021. 11. 30. : 우천으로 인한 현장침수 및 피해발생(우회도로 공사 중1차피해 발생)

○ 2022. 03. 13. : 우천으로 인한 현장침수 및 우회도로 2차피해 발생

○ 2022. 03. 26. : 우천으로 인한 현장침수 및 우회도로 3차피해 발생

4		실정보고 검토

○ 공기연장 사유

- 동부간선도로 지하차도 건설공사와 보행교 A2공사 중첩구간 교통우회 지연

- 자전거도로 및 산책로 우회도로 개설 및 우천으로 인한 수해복구

○ 공기연장(1차 2회)

· 보 행 교 : 당초 '22.05.16 ⇒ 변경 '22.12.02 증)200일

· 보차도교 : 당초 '22.05.16 ⇒ 변경 '22.11.22 증)190일

※수방기간('22.05.15~'22.10.15) 하천공사 중지기간을 포함한 일수이며 실 연장일수는

보행교 48일, 보차도교 38일 임

□ 공기연장일수 산출 내역

○ 보행교 : 연장일수 202일【교통우회 공사지연(48일)+수방기간(154일)】⇒ 적용 200일

구 분	당 초	변 경	비고
전체 2회	2021.04.19.~2024.04.18	2021.04.19.~2024.04.18	연장없음
1차 2회	2021.04.19.~2022.05.16	2021.04.19.~2022.12.02	증)200일

- '22.01.25.이후 동부간선도로 지하차도 건설공사 교통우회 지연 발생 ⇒ 48일

※ '22.03.15일 교통우회 후 A2 가시설 공사착수

- 수방기간('22.05.15.~'22.10.15.) 하천내 공사 중지⇒ 154일

○ 보차도교 : 연장일수 192일【우회도로공사(26일)+수해복구(12일)+수방기간(154일)】⇒ 적용 190일

구 분	당 초	변 경	비고
전체 2회	2021.04.19.~2024.04.18	2021.04.19.~2024.04.18	연장없음.
1차 2회	2021.04.19.~2022.05.16	2021.04.19.~2022.11.22	증) 190일

착공일

- 유관기관 공사협의조건 이행에 따른 우회도로 개설공사 : '21.11.15~12.11. ⇒ 26일

- 2차수해복구(강우량 42.1mm) : '22.03.13.~03.21. ⇒ 9일

- 3차수해복구(강우량 20mm) : '22.03.26.~03.28. ⇒ 3일

- 수방기간('22.05.15.~'22.10.15.) 하천내 공사 중지⇒ 154일

5		조 치 계 획

○ 건설사업관리단 공기연장사유 및 연장일수 보고내용을 검토한 바 유관기관

협의조건 이행, 인접 공사현장 교통우회 지연, 수해복구공사, 수방기간 하천내

공사중지 등 계약약상대자의 책임없는 사유로 공기연장은 적정한 것으로 판단

되며 공기연장 실정보고건에 대하여 승인처리 하고자 함.

붙 임 : 건설사업관리단 실정보고(공기연장) 검토보고서 각 1부. 끝.