투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(실정보고 및 관급자재 사급전환 승인 통보)

1.업무지시현장 : AI지원센터 건립공사(장기1차) (주)종합건축사사무소근정, AI지원센터

건립공사(장기1차) 웰튼건설(주), AI지원센터 건립공사(장기1차) (주

)세움이앤씨건축사사무소, AI지원센터 건립공사(장기1차) (주)마노종

합건설, AI지원센터 건립공사(장기1차) 주식회사 동해종합기술공사, A

I지원센터 건립공사(장기1차) 대라수건설 주식회사

2.작 성 일 자 : 2022-05-06 13:05:56

3.지 시 내 용

가. 근정제2022-158(`22.04.27)호, 근정제 2022-171(`22.05.02)호와 관련입니다.

나. 우리본부에서 추진중인 AI지원센터건립공사 「AI지원센터 건립공사」관련 래커주위 보강            철근 누락 실정보고 및 사급전환 실정보고 건에 대하여 우선 승인하오니 품질 및 공사에           만전을 기하여 주시기 바랍니다,

다. 아울러, 실정보고 승인에 따른 향후 계약금액 조정은 우리 본부 설계변경 절차           (또는 계약심사) 등에 따라  최종 조정 될 수 있음을 알려 드리니 업무수행에           차질없기를 바랍니다.  끝.

주무관	이제관		복지시설과장	代고병연		건축부장	05/06
代차무흥
협조자
시행	건축부-22650	(	2022.05.06	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스빌딩 13층(무교동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3707-2649	/전송	02) 3708-2659	/	uasia1@seoul.go.kr	/	대시민공개