투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰 - 창동 상계 동서간 연결교량 건설공사(보행교, 보차도교)

우리 부에서 추진중인 「창동 상계 동서간 연결교량 건설공사(보행교, 보차도교)」

준공기한 연기를 아래와 같이 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명

- 창동 상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사(장기1차)

- 창동 상계 동서간 연결교량 보차도교 건설공사(장기1차)

나. 공사기간

- 보 행 교 : 전체 '21.04.19. ~ '24.04.18(1차 '21.04.19. ∼ '22.05.16.)

- 보차도교 : 전체 '21.04.19. ~ '24.04.18(1차 '21.04.19. ∼ '22.05.16.)

다. 시 공 사

- 보 행 교 : 청광건설(주)외 1개사

- 보차도교 : 하웅종합건설(주)외 1개사

라. 준공기한 연기 내역

- 보 행 교

구 분	당 초	변 경	비고
전체 2회	2021.04.19.~2024.04.18	2021.04.19.~2024.04.18	연장없음
1차 2회	2021.04.19.~2022.05.16	2021.04.19.~2022.12.02	증)200일

- 보차도교

구 분	당 초	변 경	비고
전체 2회	2021.04.19.~2024.04.18	2021.04.19.~2024.04.18	연장없음.
1차 2회	2021.04.19.~2022.05.16	2021.04.19.~2022.11.22	증) 190일

마.연기사유 : 유관기관 협의조건 이행, 인접공사장 교통우회 지연, 수해복구 공사,

수방기간내 하천공사 중지 반영에 따른 준공기한 연기

붙 임 : 건설사업관리단 준공기한 연기 실정보고서/내부 보고서/합의각서 각 1부. 끝.

	토 목 부 장
주무관	이회진		교량건설과장	황윤기		토목부장	05/09
하현석
협조자
시행	토목부-22961	(	2022.05.09	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-3708-2576	/전송	02-3708-2599	/	colaten@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)