문서번호	방재시설부-22152
결재일자	2022. 5. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
이시연		최진우	05/09
			이동훈
협 조

「신상도 지하차도 확장공사 건설폐기물 처리용역」

설계변경(총차 4회, 3차 2회) 검토 보고

2022.5.

도시기반시설본부

(방재시설부)

「신상도 지하차도 확장공사 건설폐기물 처리용역」

설계변경(총차 4회, 3차 2회) 검토 보고

「신상도 지하차도 확장공사 건설폐기물 처리용역」과 관련하여 최종 반출완료된 건설폐기물 수량으로 설계변경(준공 정산) 하고자 함.

※ 관련공문 : 신상도감 2022-550호(2022.5.6.)

Ⅰ		용역개요

❍ 규    모 : 건설폐기물 운반(6,750㎥) 및 처리(14,290톤)

❍ 용역기간 : 총차 '19.4.1. ~ '22.5.26.(3차 '21.4.1. ~ '22.5.26.)

❍ 용 역 비 : 463,730,000원(3차 92,340,000천원)

❍ 용 역 사 : (주)삼양이앤디 외 1개사

Ⅱ		보고내용

▢ 용역 계약현황

구 분	총 차	계약현황			장래분
		1차 (준공)	2차 (준공)	3차 (현재 계약분)
용 역 비	463,730,000원	151,390,000원	220,000,000원	92,340,000원	-
용역기간	2019.4.1. ~ 2022.5.26.	2019.4.1. ~ 2020.10.31.	2020.11.1. ~ 2021.3.31.	2021.4.1. ~ 2022.5.26.	-
용역규모	운반 6,750m3 처리 14,290톤	운반 2,412m3 처리 4,240톤	운반 3,100m3 처리 7,133톤	운반 1,238m3 처리 2,917톤	-

▢ 설계변경 검토

❍ 설계변경 사유

- 최종 반출 완료된 건설폐기물 수량을 기준으로 준공 정산

❍ 총차 4회 변경내용

구 분		당 초	변 경	증 · 감
용 역 비		463,730,000원	459,910,000원	감 3,820,000원
용역 규모	폐콘크리트	9,955.38톤	10,603.27톤	증 647.89톤
	폐아스콘	3,025.36톤	2,269.35톤	감 756.01톤
	건설폐재류	1,098.59톤	1,068.59톤	감 30.00톤
	혼합폐기물	210.79톤	231.37톤	증 20.58톤
	합 계	14,290.12톤	14,172.58톤	감 117.54톤

❍ 3차 2회 변경내용

구 분		당 초	변 경	증 · 감
용 역 비		92,340,000원	88,520,000원	감 3,820,000원
용역 규모	폐콘크리트	314.00톤	961.89톤	증 647.89톤
	폐아스콘	2,573.47톤	1,817.46톤	감 756.01톤
	건설폐재류	30.00톤	-	감 30.00톤
	혼합폐기물	-	20.58톤	증 20.58톤
	합 계	2,917.47톤	2,799.93톤	감 117.54톤

Ⅲ		보고자 의견 및 조치계획

❍ 공사중 반출한 건설폐기물 최종 수량을 기준으로 준공 정산하여 설계변경함이 타당하며, 계약부서에 변경계약 의뢰하고자 함.

붙임  설계변경 검토보고 1부.  끝.