코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서 울 특 별 시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역 변경계약 의뢰((구)서울애니메이션센터 재건축사업 교통영향평가용역)

1. 미디어콘텐츠산업과-21488(2022. 5. 9)호와 관련입니다.

2.「(구)서울애니메이션센터 재건축사업 교통영향평가 용역」관련 변경계약(준공기간 연장)을 아래와 같이 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : (구)서울애니메이션센터 재건축사업 교통영향평가용역

나. 계약상대자 : 우경이앤씨(주) 대표 ***

다. 계약금액 : **********************

라. 계약기간 : '22. 2. 16 ~ 5. 16

마. 변경계약 요청내용 : 용역 준공기간 연장 ※ 계약금액 변경없음    (단위 : 원)

*************************************************************************************************************************************

************

********************************************

바. 준공기한 연기 귀책 소재 : 서울특별시

사. 지체상금 부과 여부 : 미 부과

붙임 1. 변경계약 방침서 1부.

2. (계약상대자)변경계약 요청서 등 1부.

3. 합의각서 1부.  끝

	미디어콘텐츠산업과장
주무관	박춘복		애니산업지원팀장	김성미		미디어콘텐츠산업과장	05/09
은용경
협조자	계약2팀장	고영순
시행	미디어콘텐츠산업과-21512	(	2022.05.09	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 서소문로 124, 서소문2청사 6층 (서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-9224	/전송	02)768-8969	/	pcb7102@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)