투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	별내선(8호선연장) 건설사업시스템분야 감리단
(경유)
제목	공사 변경계약 체결 알림[별내선(8호선연장) 1-2구간 정보통신공사(1차)

1. 별내선시감 제22-306호('22.4.25)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 계약내역 변경 요청한 공사건에 대하여 아래와 같이 체결되었음을 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 계 약 명: 별내선(8호선연장) 1-2구간 정보통신공사(1차)

나. 계 약 자: (주)디지팍스, (주)창흥텔레콤

다. 변경내역

구분	준공 기한 연기
	당 초	변 경
별내선(8호선연장) 1-2구간 정보통신공사(1차)	2021.05.21. ~ 2022.05.20	2021.05.21. ~ 2022.11.30

※ 총차기간 및 계약금액 변경없음

라. 변경계약일자: 2022.5.9.

바. 변경사유: 선행공정(토목 등) 지연으로 기한 연장

붙임  1. 공사변경계약서[별내선(8호선연장) 1-2구간 정보통신공사] 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김태연		정보통신과장	김이곤		도시철도설비부장	05/10
代전계목
협조자
시행	도시철도설비부-21702	(	2022.05.10	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스 빌딩 8층 도시철도설비부 정보통신과	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7320	/전송	02-772-7308	/	seoultt@seouol.go.kr	/	부분공개(5,7)