문서번호	공원시설과-20824
결재일자	2022.05.10
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		공원시설과장
이호연		05/10
		양돈욱
협 조

- 2021년 한강공원 주차장 출구차로 구조개선공사 -

실정보고(사토장 변경) 검토 보고

2022. 5.

공 원 시 설 과

- 2021년 한강공원 주차장 출구차로 구조개선공사 -

실정보고서(사토장 변경) 검토 보고

우리 본부에서 시행 중인「2021년 한강공원 주차장 출구차로 구조개선공사」와 관련 하여 시공사에서 제출한 실정보고서를 검토하고 결과를 보고 드림.

□ 관련 근거

○ 홍익산업개발(주)22-07( ̓̕22.4.19.) : 실정보고(사토장변경) 제출

□ 공사 개요

○ 공 사 명 : 2021년 한강공원 주차장 출구차로 구조개선공사

○ 공사기간 : 2021. 10. 13. ∼ 2022. 5. 31.

○ 계약금액 : *************

○ 계 약 자 : ****************

□ 실정보고 내용

○ 사토장 변경

- 당초 설계된 수도권매립지로 반입의뢰하였으나 토사반입불가 통보(수도권매립지관리공사 매립부-829호, ’22.4.11)됨에 따라 반출가능한 지역으로 변경하여 처리

- 변경내용

구 분	변 경 내 용			비 고
	위 치	거 리	단 가
당초	****** *********	*******	*******
변경	*********** *******	*******	*******

□ 검토 및 조치계획

○ 시공사에서 제출받은 실정보고서에 대하여 검토한 결과 기존 사토장 반입불가 등으로 인하여 **************************

○ 도급자가 제출한 실정보고서에 대하여 검토의견과 같이 승인하고 추후 설계변경에 차질없도록 시공사에 통보

붙임 : 실정보고(사토장 변경) 제출서 1부.