투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	대영유비텍(주)
(경유)
제목	준공기한 연기 승인회신[2021년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사(3차)]

1. 문서번호 대영유비텍(주) 대영GE22A-05-01호(2022.05.09.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 준공기한 연기 요청한 2021년 도로교통 소통개선사업 교통신호기       공사(3차)에 대하여 아래와 같이 승인 회신하오니 변경계약 및 공사시행(준공) 등의

감리업무 처리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2021년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사(3차)

나. 공사기간 : 2021. 11. 19. ~ 2022. 5. 17.

다. 준공기한 연기 승인내용 : 2022년 5월 17일에서 2022년 10월 17일까지 연기

라. 연기사유 : 노면(차선)업체(도로보수과) 미계약에 따른 본공사 시공 불가로 인한

준공기한 연기.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	오태환		기전과장	05/10
김형집
협조자
시행	기전과-21562	(	2022.05.10	)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237, 강서도로사업소 기전과 (마곡동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2657-7964	/전송	02-2657-7939	/	taehwan12@seoul.go.kr	/	대시민공개