문서번호	기전과-21540
결재일자	2022. 5. 10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	강서도로사업소장
오태환		김형집	05/10
			김용제
협조

2021년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사(3차)

준공기한 연기 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 5.

강 서 도 로 사 업 소

[기 전 과]

2021년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사(3차)

준공기한 연기 검토보고

2021년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사(3차) 관련 책임감리가 제출한 준공기한 연기요청에 대하여 내용을 검토하고 그 결과를 보고 함

□ 관련근거

ㅇ 2021년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사(3차) 공사기간 연장 요청

- 문서번호 대영유비텍(주) 대영 GE22A-05-01호(2022.05.09.)

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 2021년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사(3차)

ㅇ 공사위치 : 양천구 서부트럭터미널 교차로

ㅇ 공사내용 : 신호등주 이설 2본(좌회전 1개 차로 추가)

ㅇ 계약금액 : 25,930,000원

ㅇ 공사기간 : 2021. 11. 19. ~ 2022. 05. 17.

ㅇ 계약업체 : 광일이엔씨(주) 대표 김현실

ㅇ 감리업체 : 대영유비텍(주) 대표 조근환

□ 준공기한 연기내용 및 사유

ㅇ 연기내용 : 2022년 5월 17일에서 2022년 10월 17일까지 연기

ㅇ 연기사유 : 노면(차선)업체(도로보수과) 미계약에 따른 본공사

시공 불가로 인한 준공기한 연기

□ 조치의견

ㅇ 책임감리의 준공기한 연기요청 내용이 타당하여 관리단속과로

준공기한 연기 의뢰하여 변경계약 시행

붙임  2021년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사(3차) 공사기간

연장 요청 1부.  끝.