투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	2021년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사(3차) 준공기한 연기의뢰

1. 기전과-21540(2022. 5. 10.)호 준공기한 연기보고 관련입니다.

2. 2021년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사(3차)에 대하여 아래와 같이 준공기한을

연기의뢰 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2021년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사(3차)

나. 공사기간 : 2021. 11. 19. ~ 2022. 5. 17.

다. 계약업체 : 광일이엔씨(주) 대표 김현실

라. 계약금액 : 25,930,000원

마. 준공기한 연기내용 : 2022년 5월 17일에서 2022년 10월 17일까지 연기

바. 준공기한 연기사유 : 노면(차선)업체(도로보수과) 미계약에 따른 본공사 시공 불가로

인한 준공기한 연기

사. 준공기한 연기사유 귀책소재 : 강서도로사업소

아. 지체상금 부과여부(부과, 미부과) : 미부과

붙임  1. 준공기한 연기보고서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	기 전 과 장
주무관	오태환		기전과장	05/10
김형집
협조자
시행	기전과-21565	(	2022.05.10	)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237, 강서도로사업소 기전과 (마곡동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2657-7964	/전송	02-2657-7939	/	taehwan12@seoul.go.kr	/	대시민공개