투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	설계변경(총차14회, 9차2회) 시행 및 변경계약 의뢰(신상도 지하차도 확장공사)

우리 부에서 시행 중인 「신상도 지하차도 확장공사」와 관련하여 아래와 같이 설계변경 시행 및 변경계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명: 신상도 지하차도 확장공사

2. 계약금액: 19,792,960,000원(9차 8,383,681,000원)

3. 공사기간: 2007.12.31.~2022.5.26.(9차 2021.8.25.~2022.5.26.)

4. 계 약 자: (주)한백종합건설 외 1개사(대표 서효석)

5. 변경내용(※ 공사기간 변경 없음)

구 분		당 초	변 경	증·감
계약금액	총차	19,792,960,000원	19,791,200,000원	감 1,760,000원
	9차	8,383,681,000원	8,381,921,000원	감 1,760,000원

- 변경사유: 기 승인된 실정보고, 공사 준공수량 및 간접비 정산결과 반영

6. 예산과목: 도로 건설, 간선도로망 확충(도시개발특별), 신상도 지하차도 확장, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임  1. 설계변경 검토보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	방 재 시 설 부 장
주무관	이시연		방재시설과장	代최종구		방재시설부장	05/10
이동훈
협조자
시행	방재시설부-22240	(	2022.05.10	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, (무교동)프리미어플레이스빌딩 14층	/	https://www.seoul.go.kr
전화	02-3708-8764	/전송	02-3708-8756	/	siyeon0907@seoul.go.kr	/	부분공개(5)