문서번호	시설관리과-23032
결재일자	2022. 5. 11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
시설관리팀장		시설관리과장
정수용		05/11
		유명은
협조

『2021년 강서구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(2차수)』

공사근로자 노무비(4월) 및 장비,자재대금(1~4월) 지급 적정성 검토

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 5.

시설관리과

『2021년 강서구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(2차수)』

공사근로자 노무비(4월) 및 장비,자재대금(1~4월) 지급 적정성 검토

『2021년 강서구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사(2차수)』계약업체에서 제출한 공사근로자 노무비(4월) 및 장비, 자재대금(1~4월) 청구의 적정성 검토임

□ 관련근거

○ 하도급 대금지급 확인시스템(시장방침 제93호, 2012.4.1.)

○ 계약예규 9. 공사계약 일반조건

- 제43조의2(하도급대금 등 지급확인)

- 제43조의3(노무비의 구분관리 및 지급확인)

○ 공사 근로자 노무비 청구서 접수안내[행정지원과-22902호(2022.5.9.)]

○ 장비·자재대금 검사 요청[행정지원과-22904호(2022.5.9.)]

□ 공사현황

○ 공 사 명: 2021년 강서구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(2차수)

○ 공사개요: 밸브 및 변실교체(D80~900㎜, 178개소 등)

○ 계 약 일: 2021.06.21.(2차수 계약일: 2022.01.01.)

○ 준공기한: 2022.06.30.

○ 수 급 자: 레드탑건설(주) 대표 설희선

○ 계약금액(도급비): 금402,045,880원(금차분)

□ 보고내용

○ 노무비 청구 현황

- 노무비 청 구 일: 2022년 5월 9일

- 노무비 청 구 월: 2022년 4월분

- 노무비 총    액: 금120,418,650원(직접노무비+부가세)

- 노무비 청구금액: 금12,892,000원(금일천이백팔십구만이천원)

- 노무비 지급내역                                       (단위: 원)

노무비 총액 (2차수)	전월까지 지급금액	금월 청구금액 (4월분)	총 청구금액	잔여금액
120,418,650	0	12,892,000	25,839,000	94,579,650

○ 노무비 적정성 검토의견

검토항목	검토기준	검토내용		검토결과
노무비 청구금액 적정성	노무비 청구요청 금액과 실근로자 지급금액의 일치여부 확인	금회 노무비 청구요청 금액	12,892,000원	적 정
		금회 실근로자 지급금액	12,892,000원
		누계 (노무비 지급금액)	25,839,000원
		노무비 청구율 (총 청구금액 기준)	21.46%
	공사 공정률과 노무비 청구율의 상호 적정여부 확인	공사금액(도급비)	402,045,880원	적 정
		현재까지 기성금(예상)	170,000,000원
		예상 공정률	42.3%

○ 장비·자재 대금 청구 현황

- 대금 청 구 일: 2022년 5월 9일

- 대금 청 구 월: 2022년 1~4월분

- 대금 청구금액: 금33,888,800원(금삼천삼백팔십팔만팔천팔백원)

·자재대금: 10,238,800원, 장비대금: 23,650,000원

○ 장비·자재 대금 적정성 검토의견

- 장비대금직불 합의서(건설기계대여금지급보증서) 확인: 적정

- 건설기계임대차 표준계약서 및 각종 증명서류 확인: 적정

- 지방세, 보험료 납부 확인: 적정

- 세금계산서 등 확인: 적정

□ 행정사항

○ 공사근로자 노무비 및 장비·자재 대금 청구 적정성에 대해 검토한 바 적정하다고 판단되어 대금시스템 지급요청을 승인코자 하며,

○ 승인된 공사근로자 대금(노무비) 지급 여부 확인 시행(지급일로부터 5일이내)

붙임: 1. 공사근로자 노무비 청구 접수서 1부.

2. 장비·자재대금 검사 요청 1부.

3. 노무비 및 장비·자재 청구(지급) 서류 각 1부.  끝.