투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	기전과장
(경유)
제목	계약 변경 체결 통보[2021년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사(3차)]

1. 기전과-21565(2022.5.10.)호와 관련입니다.

2. 아래와 같이 계약 변경 체결하고 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 계 약 명: 2021년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사(3차)

구 분	변경전	변경후	변경사유
공사기한	2022. 5. 17.	2022. 10. 17.	노면(차선)업체 계약 지연

나. 계약상대자: *****************

다. 계약금액: ************

라. 계약일자: 2021. 11. 19.

마. 변경사항

바. 계약변경일 : 2022. 5. 11.

붙임  1. 공사변경계약서 1부.  끝.

	관 리 단 속 과 장
주무관	정동현		관리단속과장	05/11
代이정선
협조자	주무관	이정선
시행	관리단속과-21750	(	2022.05.11	)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 강서구 양천로 237	/	http://www.seoul.go.kr
전화	(02)2657-7913	/전송	(02)2657-7950	/	finejdh@seoul.go.kr	/	부분공개(7)