문서번호	원수관리과-20497
결재일자	2022. 5. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장
김종필		05/12
		이종근
협 조

강북취수장 취수구 주변 토사제거 공사

공사실정(사토장 변경) 검토결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 5.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

강북취수장 취수구 주변 토사제거 공사

공사실정(사토장 변경) 검토 보고

우리센터에서 시행중인『강북취수장 취수구 주변 토사제거 공사』관련하여 사토장 변경 실정보고에 따른 검토결과를 보고드림

※ 관련근거 : 인광건설 제2022********(2022.5.11)

□  공사개요

○ 공 사 명 : 강북취수장 취수구 주변 토사제거 공사

○ 공사개요 : 토사제거 847.9㎥

○ 공사기간 : 2022. 3. 25. ~ 7. 22

○ 도 급 비 : ***********

○ 시 공 사 : **************

□ 사토장 실정보고 내용

○ 당초 사토장 예정지인 김포매립지(74.7Km)로 토사를 반출토록 계획하였으나, 매립지 현장에서 토사(덤프25톤 1대)를 확인한  결과 반입 부적합 판정을 받아 매립지 반입이 불가하여 취수장으로 반송된 실정으로

○ 토사반입 가능한 사토장을 확인한 결과 아래와 같이 사토장을 선정하여 토사를 반출하고자 함(운반거리 당초 74.7→ 변경 38.8km)

구 분	사토량(㎥)	사토장 위치	운반거리(Km)
당 초	847.9	수도권 매립지(인천 서구 백석동 58)	74.7
1. 용정리	반입불가	경기 포천시 군내면 용정리 132-1	52.3
2. 효촌리	〃	경기 양주시 광적면 효촌리 491,192	47.7
3. 상성북리	〃	경기 포천시 군내면 상성북리 452 외	55.24
4. 선단동	〃	경기 포천시 선단동 295	47.0
5. 성덕리	847.9	경기 양평군 강하면 성덕리 155	38.8
사토장 현황	※ 경기 양평군 강하면 성덕리 155번지 사토장 외에는 농지성토 상부의 양질토로 성토단계로 토사 반입시기 및 토사 부적합으로 반입불가

○ 사토장 위치도

사토장(변경) : 양평군 성덕리 155 (38.8Km)

□ 검토결과

○ 당초 사토장인 김포매립지(74.7Km)로 설계되어 있으나, 매립지 반입토사 부적합에 따른 반입불가로 인하여 부득이 사토장 변경해야할 실정으로

○ 위 확인내용과 같이 반입 가능한 양평군 성덕리 155 사토장으로 변경하여 토사반출하고, 사토장 거리변경에 따른 운반비로 설계변경함이 타당하다고 사료됨

- 사토장 변경

• 당 초 : 김포매립지(74.7Km)

• 변 경 : 양평군 성덕리(38.8km)

□ 처리계획

○ 상기 검토결과와 같이 사토장 변경을 시공사에게 승인 통보하여 공사가 원활히 진행토록 조치하고

○ 사토장 변경시행 및 김포매립지 반송 토사(덤프25톤 1대)에 대하여 추후 설계변경에 반영하여 공사시행에 만전을 기하고자 함. 끝.