투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	양천구청장 (교통행정과장)
(경유)
제목	2021년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사(3차/서부트럭터미널) 준공기한 연기 알림

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2021년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사(3차)에 대하여 아래와 같이 준공기한을

연기하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 공    사    명 : 2021년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사(3차)

나. 공  사  위  치 : 양천구 서부트럭터미널

다. 연  기  사  유 : 노면(차선)업체 미계약에 따른 본공사 시공 불가로 인한 준공기한 연기

라. 당초 공사기간 : 2021. 11. 19. ~ 2022. 5. 17.

마. 변경 공사기간 : 2021. 11. 19. ~ 2022. 10. 17.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	오태환		기전과장	05/12
김형집
협조자
시행	기전과-21636	(	2022.05.12	)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237, 강서도로사업소 기전과 (마곡동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2657-7964	/전송	02-2657-7939	/	taehwan12@seoul.go.kr	/	대시민공개