의원 요구 자료 제출

시 행	소상공인정책담당관-23358	(	2022.05.12	)
접 수		(		)
결재일자	2022. 5. 12.
공개여부	대시민공개
수 신 자	내부결재

주무관	시장현대화팀장	소상공인정책담당관	노동공정상생정책관		결재
유영근	이정연	임근래	05/12
			한영희
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 675번, 안규백의원, 국방위원회)

따로붙임 : 의원 요구자료 1부.  끝.

안규백 의원(국방위원회, 더불어민주당)

요구번호 : 675번

8. 청량리종합시장일대 도시재생활성화 사업 관련(노동공정상생정책관 소관)

- 사업내용, 추진경과, 향후계획, 사업쟁점 및 현안사항

□ 의원님께서 요구하신 청량리종합시장일대 도시재생활성화 사업 관련 자료를
붙임과 같이 제출합니다.

붙임 : 청량리종합시장 일대 도시재생활성화사업 추진현황 1부.  끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (소상공인정책 담당관)	담당사무관	이정연
	☎2133-5542	담당자	유영근
	작 성 일 : 2022. 5.

□ 사업내용

목 표	전 략	세부사업	사업비(억원)	사업내용
상인및 시장재생	상인중심의 시장 재생기반 구축	1-1 청량리 종합시장 일대 도시재생현장지원센터 설립 및 운영	<16억원> - 임대료 2억 (’19~’22) - 운영비 14억 (’19~’22) · 인건비, 교육비, 활동비, 공간 운영비 포함)	- 도시재생사업 실행지원 및 상인역량강화를 위한 거점 공간조성
		1-2 상생협의체 구성 및 운영	<1억원) - 운영비 1억(회의, 활동비)	- 재생사업 추진을 위한 의사결정 및 실행주체로서 9개시장 협의체 구성
	특화자원 기반의 신사업 발굴 및 지원	2-1 차세대 상인 창업지원 플랫폼 조성	<6.6억원) - 임대료 1억, 운영비 1.6억 - 설계비 0.5억 - 공사비 3.5억	- 운영 종료된 상생장을 활용 시장산업과 연관된 창업인 지원공간 마련
		2-2 상품개발 교육 및 홍보지원	<4억원) - 운영비 2.4억 - 교육비 1.6억	- 청량리시장의 가격 및 품질의 경쟁력을 활용한 상품개발로 고객층 확대 도모
미래고객 유치	미래 변화에 대비한 문화+ 재미가 있는 시장 조성	3-1 도시한옥 활용 복합 문화공간 조성	<54.5억원) - 설계비 1.5억, 매입비 40억 - 공사비 11억, 운영비 2억	- 미래 잠재고객(젊은층)의 유입 유도 - 복합 문화기능 도입 확산을 통한 지역 일대 환경개선 및 관광자원화
		3-2 1시장 1특화 테마거리 조성	<50억원) - 설계비 2.5억, 공사비 43억 - 시설비 0.5억 - 상품제작 1억, VMD 3억	- 시장별 대표 이미지 강화를 통한 시장별 특성 제고 및 관광기반 조성
		3-3 시장별 특성 관광자원화 및 홍보강화	<8억원) - 프로그램 개발 6억원 - 운영비 2억원	- 시장별 품목특성을 기반으로 체험형 시장조성 및 홍보강화
		3-4 서울 한방진흥센터 거점기능 강화	<2억원) - 운영비 2억원	- 지역주민과의 친밀도 제고를 위한 문화체험 기능 강화
현재고객 배 려	고객이 배려받는 시장 조성	4-1 보행 네트워크 구축	<39.5억원) - 설계비 1.5억, 공사비 38억	- “비 안맞는 쇼핑거리 조성”을 통한 고객 편의 증진
		4-2 시니어 복지문화거리 조성	<4.5억원) - 설계비 0.5억, 공사비 3.5억 시설비 0.5억	- 어르신들의 홍대인 청량리시장 일대 어르신 배려 쉼터 마련
		4-3 배송서비스 운영지원	<10.4억원) - 사업비 1.4억, 운영비 9억	- 대중교통 이용 소매고객을 위한 배송서비스 구축
		4-4 공유주차시스템 구축 및 운영	<3.5억원) - 설계비 0.3억, 시설비 3.2억	- 주차장 이용도 제고를 위한 스마트 주차시스템 구축

□ 추진경과 및 향후계획

연번	사업명	추진경과	향후계획	비고
1	도시재생 현장지원센터 운영	- 2020.04. ~ 2021.04. ⦁공동체 활성화 지원 용역 (1차) - 2021.04. ~ 현재. ⦁공동체 활성화 지원 용역 (2차)	- 2022.04. ⦁공동체 활성화 지원 용역(3차) 시행 등
2	상생협의체 구성 및 운영	- 2020.05. ~ 2021.05. ⦁사전기획 및 상인회별 회의 - 2021.05. ~ 현재. ⦁상생협의체 준비위원회 구성 및 운영	- 2022.06. ⦁상생협의체 발족 (상인회 회장 및 부회장, 청년상인협동조합 등)
3	차세대 상인 창업지원 플랫폼 조성	- 2019.11. ~ 2020.01. ⦁창업지원 플랫폼 운영 TF회의(총 4차) - 2020.02. ⦁차세대상인 창업지원 플랫폼 조성사업 업무협약 체결 - 2020.09. ⦁차세대상인 창업지원 플랫폼 운영자 공모 사전 포럼 개최 - 2020.12. ⦁차세대상인 창업지원 플랫폼 조성사업 자체 타당성 검토 - 2021.02. ⦁창업지원플랫폼 운영계획 수립 회의 개최 - 2021.06. ~ 2021.10. ⦁창업지원을 위한 희망교육 프로그램 수요조사 실시 - 2022.01. ⦁사업 변경계획(안) 협의(구→시) - 2022.04. ⦁변경계획(안) 검토결과 회신(시→구)	- 2022.05. ⦁상생장 공간 내 창업지원플랫폼 조성 어려움으로 신규 공간 및 장소 구성계획(안) 검토
4	상품개발 교육 및 홍보지원	- 2020.05. ~ 2020.11. ⦁상품꾸러미 기획 - 2020.12. ~ 2021.02. ⦁청량리청과물시장 과일꾸러미 제작 및 판매 ※ 2주 간격 4회 배송 ※ 총1,000박스 판매(고객만족도 91%) - 2021.02. ~ 2021.04. ⦁시장홍보영상 제작 - 2021.07. ~ 2022.02. ⦁청량리농수산물시장 상품(밀키트)기획 - 2022.02. ~ 2022.03. ⦁밀키트 1차 판매(293개)	- 2022.06. ⦁밀키트 2차 판매 시행
5	도시한옥 활용 복합문화공간 조성	- 2020.04. ~ 2021.05. ⦁40개 이상 한옥밀집부지 및 일반건물 물색·검토 - 2021.05.31. ⦁매매의향서 체결 - 2021.06. ~ 2021.07. ⦁복합문화공간 조성 및 운영 계획(안) 기획 - 2022.01. ⦁사업 변경계획(안) 협의(구→시) - 2022.04. ⦁변경계획(안) 검토결과 회신(시→구)	- 2022.05. ⦁인접한 6개동의 한옥매입 어려움으로 별동 한옥부지 매입 및 공간구성 계획(안) 검토
6	1시장 1특화 테마거리 조성	- 2020.01. ~ 2020.07. ⦁점포환경개선(VMD)사업 용역 ※ 총 94개 시공 완료 - 2020.01. ~ 2020.11. ⦁1시장 1특화 테마거리 조성사업 디자인 및 실시설계 용역 - 2020.07. ⦁區 디자인 위원회 자문 - 2020.10. ⦁市 유니버설디자인 컨설팅 및 동대문경찰서 교통안전시설 심의위원회 통과 - 2020.11.~12. ⦁市 공공디자인진흥위원회 심의 - 2021.06. ⦁공사 위탁 의뢰 (지속가능도시과 ⟶ 도로과) - 2021.07.~09. ⦁점포환경개선(VMD)사업 수요조사 - 2021.10. ⦁청량리청과물시장 보행로 디자인 설치(도막포장) - 2021.11. ⦁청량리종합시장, 경동시장 보행로 디자인 설치(도막포장) - 2021.12. ⦁약령중앙로 특화거리 도로정비공사 계약 - 2022.04. ⦁약령중앙로 특화거리 도로정비공사 사업설명회 개최	- 2022.06. ⦁약령중앙로 특화거리 도로정비공사 착공 ⦁청량리전통시장 및 경동시장 잔여구간 보행디자인 설치(도막포장)
7	시장별 특성 관광자원화 및 홍보강화	- 2020.06. ⦁경희대학교 글로벌봉사팀 MOU 체결 - 2020.07. ~ 12. ⦁서포터즈(청년기획단) 1기 기획 및 활동 - 2021.01. ~ 12. ⦁서포터즈(청년기획단) 2기 기획 및 활동 - 2021.02. ⦁온라인 문화마켓 수업 운영 ※ 요리 및 공예 프로그램 : 각 10회 실시, 각 모집인원 100명(참석률 88%) - 2021.04. ~ 현재. ⦁라이브커머스 기획 및 라이브방송 - 2021.12. ~ 2022.05. ⦁시장별 홈페이지 제작 및 교육지원 용역 시행	- 2022.05. ⦁시장별 홈페이지 제작 및 교육지원 용역 준공 - 2022.06. ⦁서포터즈(청년기획단) 3기 기획
8	서울한방진흥센터 거점기능 강화	- 2021.05. ~ 06. ⦁한방체험실 냉난방기 이전 설치 용역 - 2021.06. ⦁한방체험실 인테리어 개선 공사 준공 ⦁한방체험실 인테리어 개선 소방 및 전기공사 준공 - 2022.02. ⦁한방공작소(체험부스) 설치	- 2022.하반기. ⦁성년의날 행사 및 전통혼례(외국인, 취약계층) 프로그램 지원 등
9	보행네트워크 구축	- 2019.12. ~ 2020.09. ⦁경동시장 아케이드 설치공사 통합실시설계 용역 - 2020.06. ⦁특정기술 선정심의위원회 개최 - 2020.11. ⦁설치공사 시행 의뢰 (지속가능도시과 ⟶ 경제진흥과) - 2021.04. ⦁경동시장 아케이드 설치공사 사업비 분담계획 보고 - 2021.06. ⦁설치공사 관련 자료 이전 (지속가능도시과 ⟶ 경제진흥과) - 2021.12. ⦁경동시장 빛·햇빛가리개(아케이드) 설치공사 계약 - 2021.12. ⦁단절구간(1, 3구간) 연결공사 실시설계 용역 시행 - 2022.04. ⦁전통시장 아케이드 단절구간 연결공사 계약	- 2022.05. ⦁경동시장 아케이드 설치공사 착공 ⦁아케이드 단절구간 연결공사 착공
10	시니어 복지문화 거리 조성	- 2020.01. ~ 04. ⦁시니어 복지문화거리 조성 대상지 현황조사 - 2020.04. ⦁제기동역사 관계자 업무협의 - 2020.11. ⦁제기동역사 내 공간활용 의견 회신 (쉼터조성 공간 제공 불가) - 2021.08. ⦁제기동역사 재협의 의견 회신 (쉼터조성 공간 제공 불가) - 2022.01. ⦁사업 변경계획(안) 협의(구→시) - 2022.04. ⦁변경계획(안) 검토결과 회신(시→구) - 2022.04. ⦁제기동역사 재협의 및 사업제안 요청	- 2022.05. ⦁서울교통공사의 제기동역사 내 공간 제공 불가 회신으로 사업계획(안) 검토 필요 ⦁왕산로 37길 도로정비(도막포장) 사업계획(안) 검토
11	배송서비스 운영지원	- 2020.06. ~ 21.03. ⦁배송서비스 관련 전문가 자문 및 회의 - 2020.10. ⦁배송서비스 상인회 의견 수렴 - 2020.12. ⦁배송서비스 구상(안) 소비자·상인 선호도 조사 및 상인회별 의견 조사 - 2021.04. ~ 06. ⦁배송서비스 타당성조사 용역 시행 및 준공 - 2021.07. ⦁상인회 의견 수렴 - 2022.01. ⦁사업 변경계획(안) 협의(구→시) - 2022.04. ⦁변경계획(안) 검토결과 회신(시→구)	- 2022.07 ⦁배송서비스 사업계획(안) 검토
12	공유주차시스템 구축 및 운영	- 2020.01. ~ 2020.12. ⦁공유주차시스템 구축 및 운영을 위한 관련부서 사전 협의 - 2021.04. ⦁청량리종합시장 지하주차장 건설 공모사업 미선정 - 2022.01. ⦁사업 변경계획(안) 협의(구→시) - 2022.04. ⦁변경계획(안) 검토결과 회신(시→구)	- 2022.05. ⦁주차가능공간 알림 시스템 구축 사업계획(안) 검토

□ 사업쟁점 및 현안사항

○ 차세대 상인 창업지원 플랫폼 조성

- 상생장 공간 내 창업지원 플랫폼 조성 검토 결과 민간 사유공간을 활용하는 계획으로 운영방식 및 사업종료 이후 지속가능성 확보의 어려움이 있어 신규 공간 및 장소 구성계획(안) 검토

○ 도시한옥 활용 복합문화공간 조성

- 당초 계획인 시장 구역 내 연속된 도시한옥 6개동(80㎡이상) 부지 확보가 어려움에 따라 별동 한옥을 매입하는 방식으로 공간 구성계획(안) 검토

○ 시니어 복지문화거리 조성

- 서울교통공사의 제기동 역사 공간협조 불가 회신으로 유사 및 필요 사업에 대한 계획(안)을 협의·검토 중이며,

- 왕산로 37길 도로정비(도막포장)사업은 도로과 협의 후 공사시행

○ 공유주차시스템 구축 및 운영

- 연계사업인 경동시장로 주차장 건설사업이 취소되어 기존 주차장을 활용한 주차게시판 설치 등 공유주차 시스템 사업계획(안) 시행 검토

○ 배송서비스 운영지원

- 배송서비스 타당성조사 용역 관련 결과 공유 및 시장별 참여의지를 확인한 결과, 참여의사가 부진하여 사업계획 재검토 필요