투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	공사 준공기한 연기 알림(2021년 횡단보도 확충정비사업 교통신호기 공사-2차)

1. 귀 구청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 사업소에 시행하고 있는 2021년 횡단보도 확충정비사업 교통신호기 공사(2차)와      관련하여 아래와 같이 준공기한 연기를 알려드리오니 병행공사 및 주민 사전 홍보       등의 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2021년 횡단보도 확충정비사업 교통신호기 공사(2차)

나. 공사장소 : 구로디지털단지 교차로 3개소

- 대륭포스트타워, 디지털1단지, 구로IT타워

다. 당초 공사기간 : 2021.11.30. ~ 2022.5.28.

라. 변경 공사기간 : 2021.11.30. ~ 2022.10.28.

마. 공사내용 : 대각선 횡단보도 시행에 따른 3개소의 신호기(차) 신설, 신호기(보)          신설 및 이설.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
수신자	구로구청장 (도로과장), 구로구청장 (교통행정과장)
주무관	호정오		기전과장	전결 05/12
김형집
협조자
시행	기전과-21644	(	2022.05.12	)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237, 강서도로사업소 기전과 (마곡동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2657-7969	/전송	02-2657-7939	/	hjung125@seoul.go.kr	/	대시민공개