투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	2021년 횡단보도 확충정비사업 교통신호기 공사(2차) 준공기한 연기의뢰

1. 기전과-21539호(2022. 5. 10.) 준공 및 납품기한 연기 검토보고 관련입니다.

2. 2021년 횡단보도 확충정비사업 교통신호기 공사(2차)에 대하여 아래와 같이 준공기한을

연기의뢰 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2021년 횡단보도 확충정비사업 교통신호기 공사(2차)

나. 공사기간 : 2021.11.30 ~ 2022.5.28.

다. 계약업체 : 무원이엔씨(주) 대표 염규주

라. 계약금액 : 55,475,400원

마. 준공기한 연기내용 : 2022년 5월 28일에서 2022년 10월 28일까지 연기

바. 준공기한 연기사유 : 노면(차선)업체의 미계약에 따른 공사기간이 부족하여 준공         기한 연기

사. 준공기한 연기사유 귀책소재 : 강서도로사업소

아. 지체상금 부과여부(부과, 미부과) : 미부과

붙임  1. 준공 및 납품기한 연기보고서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	호정오		기전과장	김형집		강서도로사업소장	05/12
김용제
협조자
시행	기전과-21649	(	2022.05.12	)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237, 강서도로사업소 기전과 (마곡동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2657-7969	/전송	02-2657-7939	/	hjung125@seoul.go.kr	/	대시민공개