문서번호	급수운영과-23236
결재일자	2022. 5. 13.
공개여부	부분공개(6)

주무관		급수운영팀장		급수운영과장					결재
안윤자		代안윤자		05/13
				이승완
협 조	주무관
	윤승구

교육일지(서울시설공단 상수도 공사감독 대행사업 )

교육대상

급수·시설 토목직

교  관

급수운영과장

교육일시

2022년  5월  9일 14시~15시

교육과목

서울시설공단 상수도 공사감독 대행사업

교육

내용

본부 누수대응과 「서울시설공단 상수도 공사감독 대행사업」 지도점검 시

지적사항 잘 숙지하여 올해 동일사례가 발생하지 않도록 할 것

1. 공사감독 위탁사무 지적사항(공단 소관사항)

- 착공신고서 검토보고서 제출 지연 : 7일 이내 착공보고

- 최종 설계변경 제출기한 미준수 : 준공 7일(본부심사 14일) 이내  승인의뢰

- 단수승인 절체 제출기한 미준수 :  작업예정일 5일 이내 승인의뢰

- 공정관리 소홀로 인한 공사추진 지연

2. 단위사업 담당업무 지적사항(사업소 소관사항)

- 도로굴착허가, 관급자재 구매 지연 등 공사착공 사전준비 미비로 준공기한 연기

- 공사계약 통보 미시행(계약체결된 2건 통보완료)

- 단수계획 승인 미조치

- 현장실정보고 검토결과 미통보

- 최종설계변경 승인 요청에 대한 검토결과 미통보

특이사항

올해 사업담당 대면 교육, 그외 비대면 교육

.