투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	공사실정보고 승인 통보(2021 청계천 차집관로(우안) 단면보수공사)

1. 공사감독2처-3271호(2022.5.6.)와 관련입니다.

2. 귀 기관에서 감독수행중인 「2021 청계천 차집관로(우안) 물막이공사」와 관련으로 펌프추가 및 이송관로 연장 등 실정보고 사항에 대하여 아래와 같이 승인통보하오니 공사관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 승인사항

- 펌프 추가반입 운영(11대→15대)

- 이송관로(호수) 연장 및 추가설치(L=529m×11열→L=580m×15열)

- 역지블럭지점 맨홀덮게 교체(원형766mm, 1개소→2개소)

- 안전관리비 신규반영(공사안내간판 및 가림막휀스 등)

- 보행안전도우미 규격 및 단위조정(일→인)

나. 공사 마무리 단계로서 준공시까지 작업자 및 보행자 안전사고가 발생하지 않도록 만전을           기하여 주시기 바랍니다. 끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	이석근		시설보수과장	05/13
안종필
협조자
시행	시설보수과-21140	(	2022.05.13	)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동, 중랑물재생센터)	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2211-2572	/전송	02-2211-2579	/	sttomog@seoul.go.kr	/	대시민공개