문서번호	건축부-23008
결재일자	2022. 5. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		복지시설과장	건축부장
이제관		이문희	05/13
			代차무흥
협조
	주무관		이상근

『AI지원센터건립공사 건설사업관리용역』

토목 건설사업관리기술인 추가 배치 검토 보고

2022. 5.

도시기반시설본부

(건 축 부)

『AI지원센터건립공사 건설사업관리용역』

토목 건설사업관리기술인 추가 배치 검토 보고

『 AI지원센터건립공사 건설사업관리용역』관련 안전감사담당관 지적사항에 대하여 토목건설사업관리기술자 추가 배치를 검토후 보고 드림

Ⅰ		용역개요

용 역 명 : AI지원센터 건립공사 건설사업관리 용역

용역내용 : 건설기술진흥법에 따른 건설사업관리 (감독권한대행)

- 건축,안전,토목,조경,기계,전기,정보통신,소방,폐기물, 관급자재 등 전 분야

용역기간 :′21.05.10.~′23.05.09. (2차:′21.05.10.~′22.11.30.)

용역금액 :  ********************************

용 역 사 : (주)종합건축사사무소 근정 외 2개사

Ⅱ		현 황

공정현황 - 공정률 30.82%

복공판 하부 암반 파쇄작업중	지하1층 기둥 및 벽체 철근배근 작업

공사 진행현황

- 토목공사 95% 진행중 건축물 출입구 복공판 하부에 기계실 및 집수정 위치에 당초     설계에 없던 암반 발견으로 1.5개월째 암반파쇄(할암공법) 작업

※ 암발생으로 인한 공사 지연을 방지하고자 시공사 설계변경없이 암반 파쇄 작업중

Ⅲ		건설사업관리기술 추가배치

관련근거

- 2022년도 서울시 공사장 중대재해 예방 점검〔안전감사담당관-21592(2022. 4.29)〕

건설사업관리기술자 추가 배치 사유

*******************************************************************************************************************************

토목 건설사업관리기술자 추가 배치

구분	당초 배치기간	추가 배치 기간	비고
****** *******	****************** *************	*****************
*******	******	******

Ⅳ		처리의견

○ **************************************************

*************

*****************************************

붙임  1. 토목기술인 투입 승인요청 (대용량 첨부).